문서번호	지리정보과-87
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설관리부장
이경희		오기석	01/06 윤석우
협조
	주무관		김동구

[’13년 상수도 GIS DB 정확도개선사업]

4분기 추진실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

상수도사업본부

(지리정보과)

『’13년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』

추진실적보고(4분기)

’13년도 성과관리계획(BSC)과 관련 『상수도 GIS DB 정확도개선사업』 에 대한 4분기(12월말) 추진실적을 보고드립니다.

□ 사업개요

○ 사업목표 : 지리정보시스템(GIS) DB구축 580㎞

○ 사 업 비 : 4,817백만원

○ 사업내용 : 상수도시설물 조사 ․ 탐사, 측량 및 DB 관리

〈총사업규모〉

- 기   간 : ’05 ~ ’20년 (사업비 848억원)

- 대   상 : 상수도관로 10,468㎞

□ 용역 계약현황

○ 용역명 : ’13년 상수도 GIS DB 정확도개선사업

구 분	동남지역	서북지역	서남지역
용역내용	측량 및 편집 : 202㎞ (신설38km, 기존164km)	측량 및 편집 : 194㎞ (신설26km, 기존168km)	측량 및 편집 : 184㎞ (신설10km, 기존174km)
용역기간	’13. 1. 1 ～ 12. 31	’13. 1. 1 ～ 12. 31	’13. 1. 1～ 12. 31
용 역 비	1,472,745천원	1,403,530천원	1,305,853천원
사 업 자	새한항업(주)외 2 [(주)범아엔지니어링(주)한국에스지티]]	중앙항업(주)외 1 [제일항업(주)]	삼아항업(주)외 2 [공간정보기술(주),(주)네이버시스템]

□ 주요 추진실적(4분기)

○  공정보고회 개최(’13. 10. 15)

- 내용: 9월간 추진실적 및 향후추진계획 보고(참석자 사업 PM 등 12명)

○  용역 중간보고회 개최(’13. 11. 20)

- 참석자 : 시설관리부장외 관련과장 및 용역 PM 관계자 총 24명

- 결과 : 주요의견 검토 및 보고회시 제시된 냉용 사업에 반영조치

○  불탐구간 점검 및 재탐사 결과보고(’13. 12. 13)

- 대상 : 불탐 및 준탐관로 495개소 총연장 38.06㎞

- 점검기간 : ’13. 11. 21 ~ 12. 2

- 결과 : 탐사율 상승 2.1%(92.7% → 94.8%)

○  공공측량 성과심사 실시(’13. 12. 18)

- 결과 : 적합 판정(일부 미흡한사항은 수정보완 조치완료)

- 기간 : ’13. 11. 6 ~ 12. 18(대한측량협회 통보일)

○  설계변경 시행(’13. 12. 18)

- 내용 : 계약금액 변경 없이 실제 시행량에 따른 물량변경

- 변경계약 의뢰 : ’13. 12. 18(본청 재무과)

○  정확도검사 실시결과 보고(’13. 12. 23)

- 1단계 검사 : ’13. 12. 6 ~ 12. 15(측량협회 성과심사 입회)

- 2단계 검사 : ’13. 12. 16 ~ 12. 20(용역수행사간 교차검사)

- 결과보고 : ’13. 12. 23(검사결과 미진한 사항 보완 조치완료)

○  준공검사 실시(’13. 12. 24)

- 내용 1차분 준공성과 검사(준공금액 : 총 4,180백만원)

○ 추진실적(12월말 기준)

공정	목표	추진실적(㎞)			공정(%)
		계	신설	기존
조사․탐사/측량 DB 구축	580	580	57	523	100

□  지표 및 세부사업 추진실적

구 분	'13년 목표치	4/4분기 목표치	추진실적
상수도 GIS DB 구축율(KPI)	43.74%	43.74%	43.74% (누계 4,579㎞)

※ 총 사업대상 10,468㎞ 대비 실적임(’12년까지 추진실적 3,999㎞)

□ 예산집행 실적

(단위 : 천원, %)

단위 사업명	예산현액	집행실적(12월말)		비고
		지출금액	집행률
상수도GIS DB 정확도개선사업	5,154,124	4,621,049	89.65%

※ 지출금액은 2013년도 예산현액중 지출금액임.

따로붙임 : 1)BSC 주요사업 추진결과 보고서  1부.

2)주요사업 월별추진 실적 1부  끝.