문서번호	보행자전거과-13080
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자전거시설팀장	보행자전거과장
김성유	이성환	10/02 이방일

기술용역 준공기한 연기 검토보고

(도심연결 자전거간선망 구축 시범사업 기본 및 실시설계용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

보행자전거과

『도심연결 자전거간선망 구축 시범사업 기본 및 실시설계용역』 기술용역 준공기한 연기 검토보고

도심내 진입 가능한 자전거간선망의 조속한 확충을 위하여 한강과 도심을 연결하는 자전거간선망 구축 기본 및 실시설계용역을 수행하고 있으나 시범노선에 대한 타당성조사 및 자전거우선도로의 효과분석을 과업에 반영토록 자문의견이 제시됨에 용역준공 기한 연기에 대한 검토 보고임.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 자전거도로 인프라 구축 기본계획수립 용역

○ 용역내용 : 자전거도로 구축 4.2㎞

- 양화로(2.0㎞), 마포로(1.1㎞), 동호로(1.1㎞)

○ 용역기간 : '15. 3. 9 ~ '15.10.4

○ 용역금액 : 109,425,300원(일억구백사십이만오천삼백원)

○ 시 행 사 : ㈜ 글로벌건설이엔지

□ 보고내용

○ 용역과업수행중 자문의원으로 추가적인 시범노선에 대한 사업추진 타당성 조사 및 자전거우선도로에 대한 효과분석이 필요하며, 유관부서 협의 등에 따른 절차를 이행하는데 시일이 필요하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 함.

□ 조치계획

○ 준공기한 연기 : 변경전 ‘15.10.4 ⇒ 변경후 ’15.10.30

○ 연기사유 및 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

※ 계약물량 및 계약금액 변동없음

붙 임 : 용역계약변경 관련문서 1부.  끝.