	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(도심 연결 자전거간선망 구축 시범사업 기본 및 실시설계용역)

1.「도심연결 자전거간선망 구축 시범사업 기본 및 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 도심연결 자전거간선망 구축 시범사업 기본 및 실시설계용역

나. 계약업체 : ㈜ 글로벌건설이엔지(대표 : 이경민)

다. 준공기한 연기

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	2015.3.9 ~ 2015.10.04	2015.3.9 ~ 2015.10.30	26일 연장
계약금액	109,425,300원	109,425,300원	변경없음

라. 변경사유 : 용역과업수행중 추가적인 시범노선에 대한 사업추진 타당성조사 및 자전거우선도로에 대한 효과분석이 필요하며, 유관부서 협의 등에 따른 절차를 이행하는데 시일이 필요하여 계약기간을 연장하여 용역 성과물을 보완하기 위함

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연장 검토보고(별도송부) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서(별도송부) 1부.

3. 준공기한 연기 제출공문 및 합의각서(별도송부) 1부. 끝.

	보행자전거과장
주무관	김성유		자전거시설팀장	이성환		보행자전거과장	10/02 이방일
협조자
시행	보행자전거과-13079	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	02-2133-2433	/전송	02-2133-1052	/	ksy135@seoul.go.kr	/	대시민공개