문서번호	교량안전과-2173
결재일자	2015.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
김근섭		정회평	전결 10/05 이용심
협 조
	교량관리팀장			유제천
	강구조교량팀장			류봉현
	기술점검팀장			최진우
	주무관			오석관
	주무관			전재형

봉은교 외 11개 일반교량 집중점검 계획

(하반기 정기 점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  10

안전총괄본부

(교량안전과)

봉은교 외 11개 일반교량 집중점검 계획

(하반기 정기점검)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 하반기(10월,11월) 시행하는 봉은교 외 11개 교량 집중점검(하반기 정기점검) 계획을 보고 드림

관련근거 : ‘15년 교량시설물 안전점검계획(교량안전과-1392호,2015.1.30)

10월, 11월 점검대상 : 12개소

연 번	교 량 명	규 모	위 치	최 대 경간장	교량형식	준공일	시 공 자	설 계 하 중	비 고
							설 계 자
1	봉은교	B=25m, L=255m	강남구 삼성동 ~ 송파구 잠실동	55	S.T BOX GIR	'99.10.31	한신공영외 4개사 (주)동일기술공사	DB-24
2	금천교	B=21.4m, L=665m	금천구 독산동 ~ 광명시 하안동	42	P.F GIR	'89.11(구) '92.12.(확)	성지건설	DB-24
3	이수고가	B=8.5m(2~4차) L=1,819m	서초구 반포동82 ~ 동작구 동작동86	55m	S.t Box Girder	‘01.12.15	경남기업(주)외1 제일엔지니어링	DB-24
4	선유고가	B=8.5~19m(2~3차) L=432m	경인고속도 입구 ~ 영등포구 양평동3가 76	50m	S.t Box Gir	‘91.12.29	극동건설 천우,삼우기술단	DB-24
5	신정교	B=15.5~36m L=535m	양천구 신정동 ~ 영등포구 문래동	40	P.F GIR	‘90.6.30 ‘98.5.30	풍림산업 외2 (주)삼우기술단	DB-24
6	숯내교	B=32.5m, L=230m	강남구 자곡동~ 송파구 장지동	50	닐센아치	'08.4.30	계룡건설(주) 건화엔지니어링외1	DB-24
7	영등포역 고가	B=15m(4차) L=637m	영등포구 영등포동628 ~문래동3가14	60m	S.t Box Gir	‘96. 9.15	삼호건설	DB-24
8	보라매 고가	B=15~22.5m(4차) L=1,699m(좌) L=1,827m(우)	영등포구 구로디지탈단지역 ~동작구 신대방역	65m	S.t Box Gir R.c 스라브	‘94.7.29	한신공영,천혜종합 삼익건설,도화기술단	DB-24
9	사당고가	B=22m(6차) L=300m	관악구 남현동1059 ~ 서초구방배동505	50m	S.t Box Gir	‘97.4.30	삼부토건 삼보기술단	DB-24
10	오류고가	B=15.3~18.7m(4차) L=330m	구로구 궁동213~ 구로구 오류동123	55m	S.t Box Gir	‘99.2.14	흥화공업(주)외4 삼환엔지니어링	DB-24
11	서해안로 연결램프	B=4.95~6m (1차) L=234.4m	구로구 개봉동	50m	S.t Box Gir	‘12.1.20	현대산업개발 (주)	DB-24
			구로구 구로동631 ~ 광명시계	50m	S.t Box Gir	‘98.7.31	대림산업 한국종합기술개발공사	DB-24
12	광명고가	B=25m(6차) L=276m

※ 9월점검 완료시설 : 양평교,양화교,도림천고가,탄천1교,영동6교, 선암고가는 민자 시설로 민자 관리주체(우면산 인프라)에서 점검 실시

점검개요

○ 점검일정 및 참여자 등

교량명	점검일자 (2015년)	점검구간 / 참여자			비고
		점검구간	교량안전과	주치의
봉은교	10.8(목)	상하부	강남일반(4)	㈜유신 이경환	정밀진단중
			기술점검(2)
금천교	10.13(화)	본교 (독산역부근)	강남일반(4)	백양엔지니어링 홍승근
		본교 (안양천구간)	교량관리(2)
		램프,계단	기술점검(2)
이수고가	10.15(목)	A,C,D라인	강남일반(4)	인하공전 전준태	자체점검중
		B라인	기술점검(2)
선유고가	10.20(화)	상하부	강남일반(4)	㈜다음이엔씨 민대홍
			교량관리(2)
신정교	10.22(목)	상하부	강남일반(4)	롯데건설 이주호
			교량관리(2)
숯내교	10.27(화)	상하부	강남일반(4)	㈜캐어콘 이진용	정밀점검중
			기술점검(2)
영등포역 고가	10.29(목)	상하부	강남일반(4)	인천대교수 전찬기
			기술점검(2)
보라매 고가	11.3(화)	대림방향	강남일반(4)	선문대학교 이진용	정밀점검중
		신대방방향	강구조(2)
사당고가	11.5(목)	상하부	강남일반(4)	㈜도화 박기혁
			기술점검(2)
오류고가	11.10(화)	상하부	강남일반(4)	노경찬 (전 서울시)
			기술점검(2)
서해안로 연결램프	11.12(목)	상하부	강남일반(4)	지에스씨개발엔지니어링 곽수현
			기술점검(2)
광명고가	11.17(화)	상하부	강남일반(4)	서울과기대 박용걸
			강구조(2)

- 자체점검 외부전문가 및 정밀점검 용역사 합동점검 실시

- 내부 업무 관계 등으로 일정 조정 필요시 조정하여 시행

○ 주요점검사항

- 상부 : 포장면, 신축이음장치, 후타재, 교통안전시설, 도로부속시설 등

- 하부 : 하면 백태, 신축이음부 누수, 교좌장치, 배수관 이음부 누수

하부 슬래브 상태 등

○ 세부 일정계획

- 13:30 : 시청 출발

- 14:30 : 각팀 점검 차량으로 이동하여 집결지(점검당일 설명) 도착

- 14:30 ~ 14:35 : 점검 동선 등에 대해 현장 설명

- 14:35 ~ 17:30 : 점검 실시

○ 점검자 준비물 :  안전모, 점검가방, 렌턴 등

점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ‘15 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립후 시행

행정사항

○ 점검 당일 중점점검사항 및 점검동선 자료  배포

○ 시설물 담당 시설안전자문위원 점검일정 안내, 점검수당 20만원 지급

○ 시설물 담당자 점검 설명자료 준비

○ 각 점검팀에서는 별첨 서식1에 의거 강남일반교량팀에 점검 결과 (메일)제출

첨부  집중점검 결과 제출 서식 1부.  끝.

(서식1)

집중점검 결과 보고

○ 시 설 명 :

○ 점검일자 : 2015.    .   (    )

○ 점검구간 :

○ 점검결과

위 치	점검결과	조치의견	점검사진	비고

점검자 :   위부전문가    소속               성명          (서명)

점검자 :   교량안전과    직급               성명          (서명)

성명          (서명)