투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	납품기한 연기 시행(하이브리드 가로등 조달구매)

우리 사업소에서 시행중인 「하이브리드 가로등 조달구매」에 대하여 다음과 같이 납품기한을 연기하여 시행하고자 합니다.

가. 납품기한 변경내용

건 명	계약번호	물품명	납품기한		연기사유
			변경 전	변경 후
하이브리드 가로등 조달구매	21143187000	신재생에너지가로등	2015.10.09	2015.10.24	공원내 행사등으로 시민 안전사고 예방을 위한 납품기한 연기

나. 계약금액 : 49,600,000원

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 귀책소재 : 서부공원녹지사업소

붙임 : 방침서 1부.  끝.

주무관	채민수		기전시설팀장	이기석		시설과장	임병국		서부공원녹지사업소장	10/05 안해칠
협조자
시행	시설과-4358	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5563	/전송	02-300-5569	/	mschae0920@seoul.go.kr	/	대시민공개