문서번호	도로계획과-1768
결재일자	2015.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	민자사업팀장	도로계획과장	안전총괄관		안전총괄본부장
김정식	정회원	최동필	권기욱		10/05 김준기
협 조

서부간선도로 일반도로화 및 친환공간조성 사업 설계용역 추진계획 보고

2015. 10.

안전총괄본부

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성사업

설계용역 추진계획 보고

서부간선지하도로 사업과 연계하여 추진 예정인 ‘서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 사업’ 설계용역 추진계획 보고임

1		사업현황

□ 사업개요

❍ 위    치 : 영등포구 양평동(목동교) ~ 금천구 독산동(금천교)

❍ 규    모 : 폭원 15m, 연장 8.1km

- 친환경공간 조성 :179,790㎡

․ 녹지 67,900㎡, 시설 65,900㎡, 자전거도로 24,300㎡, 중앙분리대 6,015㎡

․ 그린웨이 및 보행녹도 : 15,585㎡

❍ 총사업비 : 91,589백만원

❍ 사업기간 : 2013. ~ 2023.

□ 추진경위

❍ '13.04.25  : 서남부지역 발전구상 보고(시장)

❍ '13.04.29~5.3  : 금천·구로·G밸리 현장시장실 운영

❍ '13.06.03  : 서남부지역 발전을 위한 서부간선도로 지하화 추진계획 수립

- 서부간선도로를 일반도로화하여 친환경공간 조성 추진

❍ '13.09.23 : 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

❍ '14.03.27 : 자치구 의견수렴 T/F 회의

❍ '15.02.25 : 타당성조사 및 기본계획 용역 준공

❍ '15.06.23 : 타당성 용역 검증 요청(서울시→S-PIMs)

❍ '15.08.31 : 타당성 용역 검증결과 통보(S-PIMs→서울시)

- 경제성 분석결과, 4차로 운영방안은 B/C=1.06, 3차로 운영방안은
B/C=0.99로 산정됨.

4차로 운영	3차로 운영
B/C=1.06	B/C=0.99

□ 예산 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
계	91,5891)	427		500	570	1,284	1,927		30,293	34,599	21,989
설 계 비	4,708	427		500	570	1,284	1,927
공 사 비	83,041								29,064	33,217	20,760
감 리 비	3,840								1,229	1,382	1,229

주. 1) 총사업비는 서울공공투자관리센터에서 재산정한 사업비임.

※ 2016년 예산(5억원)으로 설계용역(장기계속) 발주 예정.

2		설계 추진계획

□ 설계 추진 기본방향

❍ 서부간선도로 일반도로화 운영 및 친환경공간 조성 방안에 대한 검증

❍ '20년 준공예정인 서부간선지하도로 사업과 연계하여 효율적인 설계 추진

❍ 지역주민과 자치구 의견을 충분히 수렴하여 주민 친화를 위한 Living Street 계획 수립

❍ 최적 대안으로 경제적인 설계 시행

□ 설계 추진방안

❍ 서부간선지하도로 준공('20년) 이후 본 사업의 공사가 추진될 예정이므로 기본설계와 실시설계를 분리 시행하여 단계별 설계수행의 수준 제고

- 기본설계 : 2016.02 ~ 2017. 02

- 실시설계 : 2018.02 ~ 2019. 02

❍ 용역비 : 기본설계 1,070백만원, 실시설계 3,211백만원

❍ 기본설계용역 발주방식 : PQ(Pre-qualification)

- 추정가격 2.3억원 이상의 기술용역으로 기술·가격 분리입찰(사업수행능력심사(PQ) 후 가격입찰) 실시

- 추정가격 10억원 이상의 기술용역이며, 특수교량, 3km 이상 터널,  500m 이상 도시부 장대지하도로 등 난이도가 높은 시설물은 기술자평가서 평가(SOQ, Statement of qualification)를 시행하여야 하나, 단순 도로개량은 해당 없음.

3		향후계획

❍ '15.10 : 투자심사 및 기술용역 타당성심사.

❍ '16.01 : 용역발주심의 등 사전절차 진행 및 용역 발주. 끝.