함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(풍납취수장 침사지 준설공사)

1. 우리정수센터내 시행중인 『풍납취수장 침사지 준설공사』 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 풍납취수장 침사지 준설공사

나. 계약업체 : 건웅토건(주) 대표 이상춘

다. 공사기간 : 2015.09.16. ~ 2015.11.14

라. 계약금액

- 당 초 : 금삼천삼백사십육만일천칠백오십원(\33,461,750원)

- 변 경 : 금일천오백구십이만팔천원(\15,928,000원)

-  감)  : 금일천칠백오십삼만삼천칠백오십원(\17,533,750원)

마. 변경사유 : 시공물량 및 제경비 감에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 원수및취수비, 기타교체비

따로붙임 : 1) 설계변경 보고서 1부.

2) 변경 합의서 1부.

3) 설계변경 심의위원회 개최 결과 보고 1부.

4) 설계변경 내역서 1부.  끝

주무관	김왕주		주무관	박소현		정수시설과장	代김오열		영등포아리수정수센터소장	10/05 임정규
협조자
시행	정수시설과-9331	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화		/전송		/		/	대시민공개