함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰

1. 우리 영등포아리수정수센터 『풍납취수장 침사지 준설공사』 시행 중 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건     명 : 『풍납취수장 침사지 준설공사

나. 계 약 자 : 건웅토건(주)  대표자 이상춘

다. 공사기간 : 2015. 09. 16. ~ 2015. 11. 14.

구 분	당초계약금액	설계변경금액	증 감	비고
도급비	33,461,750	15,928,000	-17,533,750

라. 설계변경 내용                             (단위:원)

마. 설계변경 사유

- 공종별 물량증․감 발생에 따른 설계변경

- 건강, 연금보험료 정산

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 원수 및 취수비, 기타교체비

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 시행 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	정수시설과장
주무관	김왕주		정수시설과장	전결 10/05 代김오열
협조자
시행	정수시설과-9332	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화		/전송		/		/	대시민공개