문서번호	슬러지재활용과-7696
결재일자	2015.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방공업사무관대우		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
김용찬		이동신	10/05 김동기
협조

소화조 및 저류조 청소용역

설계 변경 실정 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

소화조 및 저류조 청소용역

설계 변경 실정 보고

우리센터 소화조 및 저류조 협잡물 청소용역 중 아래와 같은 설계변경 사항이 발생하여 검토 보고를 드림.

□ 청소 대상

구 분 (사업명)	당 초	변 경	비 고 (증감 및 변경사유)
소화조 및 저류조 협잡물 청소용역	○ 청소물량 : 5,967㎥ - 2소화조 2조 - 3소화조 2조 - 3농축조 1조 - 3벨트 저류조 2조 - 3원심 저류조 2조	○ 청소물량 : 5,334㎥ - 2소화조 1조(감1조) - 3소화조 2조 - 3농축조 1조 - 3벨트 저류조 2조 - 3원심 저류조 2조 3반류수 저류조(증)	○ 감 : 633㎥(금액 –20,832천원) - 2소화조 1조(감 691㎥) : 물재생과 보수예산 부족으로 2소화조 1개소 보수 취소 - 3반류수오니 저류조1조(증 58㎥) : 3반류수오니 저류조에 침사가 많이 유입되어 펌프가 자주 고장이 발생 하여 청소 시행

□ 조치 계획

- 당초 2소화조 2조(8,10호)를 청소하고자 하였으나 보수예산 부족으로 1개소를 취소하여 2소화조(8호)를 청소대상에서 제외하고, 3농축기동 반류수오니 저류조에 모래가 많이 유입되어 모노펌프가 자주 고장이 발생하고 있어, 추가로 청소를 실시하고자 하며 추후 설계변경시 정산조치 하고자 합니다.   끝.