“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
		서울특별시
수신	양천구청장(문화체육과장)
(경유)
제목	2015년도 생활체육시설확충사업 변경 승인 알림

1. 양천구 문화체육과 - 22831(2015.9.17.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 2015년도 생활체육시설확충사업(목동 유수지 테니스장 조성)에 대하여 다음과 같이 사업계획을 변경 승인하오니 사업추진에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 변경내용

구 분	당 초	변 경
위 치	양천구 목동동로 298(목동주차장 내)	좌 동(변동없음)
사 업 비	400백만원	좌 동(변동없음)
사업규모	ㅇ 하드코트 3면 ㅇ 부대시설(화장실, 휴게실 등) 신축	ㅇ 하드코트 6면 ㅇ 부대시설 개선(이동 재배치)

나. 변경사유

- 목동 유수지 상부에 각종 부대시설(화장실, 휴게실 등)의 건축행위가 어려운 상황으로 계획 변경.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							최인종			청소년체육팀장					김하년					체육진흥과장					전결 10/05 김두성
협조자
시행			체육진흥과-3201									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층															/
전화		02-2133-2742						/전송			02-2133-2742					/	cij2020@seoul.go.kr												/	대시민공개