문서번호	시설과-4984
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규		10/06 이춘희
협 조
	주무관		이전호

「서울가정행정법원 옥상녹화·텃밭조성 사업」

실정사항 검토 및 설계변경 보고

2015. 10

동부공원녹지사업소

시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「서울가정행정법원 옥상녹화·텃밭조성 사업 」

실정사항 검토 및 설계변경 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울가정행정법원 옥상녹화·텃밭조성 사업

○ 위    치 : 서초구 강남대로 193

○ 공사내용 : 식재기반, 수목식재, 휴게시설설치, 데크공사 등

○ 공사기간 : 2015. 08. 12 ~ 10. 10

○ 총공사비 : 금231,852,400원(이억삼천일백팔십오만이천사백원)

도급액 : 금202,284,000원/ 관급자재 29,568,400원

○ 도 급 자 : 천지조경(주) 대표 정국선

□ 실정사항 보고

○ 주요 변경 내용

- 식재환경 여건을 고려하여 식재 수량 조정

- 행정동에서 가정동으로 이어지는 데크C 보행 동선상에 기둥과 기둥을 지지하는 철 와이어로 인한 통행이 불가하여 선형 변경

- 식재수종 중 수목명찰이 없는 수종이 있어 추가설치 필요

○ 실정보고 세부내역

(단위 : 천원)

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
식재 (사급)	▷ 식재환경 여건을 고려하여 식재 수량 조정	▷ 관목 • 회양목 등 6종- 390주 -> 355주 ▷ 초화류 • 구절초 등 17종- 8,180주 -> 6,310주	감 2,843
식재 (관급)	▷ 식재환경 여건을 고려하여 식재 수량 조정	▷ 초화류 • 꼬리풀 등 17종- 9,972주 -> 8,230주	감 3,931

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
시설	▷ 행정동에서 가정동으로 이어지는 데크C 보행 동선상에 기둥과 기둥을 지지하는 철 와이어로 인한 통행이 불가하여 선형 변경	▷ 데크C 선형 변경(물량 변동 없음)	-
	▷ 식재수종 중 수목명찰이 없는 수종이 있어 추가설치 필요	▷ 당초 설계된 목재 명찰보다 견고하고, 저렴한 알루미늄 재질로 변경 • 수목명찰(목재)-24EA -> 0EA • 수목명찰(알루미늄)-0EA -> 120EA	증 939

□ 소요예산 내역(감 6,886천원)

(단위 : 원)

구 분	소요 금액			비고
	당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비	231,852,400	224,985,420	-6,866,980
공 급 가 액	183,894,546	181,226,364	-2,668,182
부 가 가 치 세	18,389,454	18,122,636	-266,818
도 급 공 사 비	202,284,000	199,349,000	-2,935,000
관급자재비	29,568,400	25,636,420	-3,931,980

□ 검토의견

○ 상기 각 항목별 실정보고 사항에 대하여 설계 변경 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 실정사항 보고 및 공문 1부.

2. 변경내역서 1부. 끝.