문서번호	시설보수과-7815
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	10/06 조병준
협조

서울교 보수공사 현장 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

현장 실정보고

“2015년 서울교 보수공사” 시행중 물끊기공, 빗금도색, 임시차선도색, 차선규제봉설치, 아스팔트 절삭두께 등에 대하여 현장여건을 감안한 공사시행으로 안전하고 원할한 교통흐름과 교통사고를 방지하고자 함

※ 시설관리공단 공사감독2처-15739호(2015.10.05.)

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : “2015년 서울교 보수공사”

공사기간 : 2015.6.17. ~ 2015.12.13.

공사개요 : 개질아스콘포장 63.87a, 도막방수(슈프림데크코트 M6) 6,387㎡, 중분대차수조인트 236m, 균열보수 169m, 표면보수 236㎡ 등

도 급 액 : 709,642,900원

계 약 자 : 류진산업㈜ 대표 장혜자, (유)윤진종합건설 대표 박용

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		현장 실정보고 사항

물끊기공 변경

당초 A1, A2 신축이음부 하면에 물끊기공(AL-T형) 설치계획이었으나, 교대흉벽과 상부구조 사이 공간 협소로 설치작업이 불가능하여 슬래브 캔틸레버 외측부(S6 좌측) 물끊기공 설치(L=25㎝)로 변경 시행 -(정밀점검업체 의견서)

중앙분리대 빗금도색

당초 중앙분리대 측면에만 빗금도색이 반영되어 있었으나, 주행안전성 향상을 위해서는 중앙분리대 상면에 빗금도색 추가시공 필요

임시차선 및 차선규제봉 설치

○ 아스팔트포장 절삭, 교면방수, 아스콘 1차포장, 아스콘 전면포장 등 단계별 시공에 따른 임시차선 도색으로 교통사고 예방 및 원활한 교통흐름 유지

○ 아스팔트 포장 절삭시 기존 포장면과의 단차(8㎝) 발생으로 차로변경시 위험함으로 차선규제봉 설치(160개) 필요

아스팔트 절삭두께 변경

당초 아스팔트 포장 절삭두께는 T=8㎝로 일괄 반영하였으나, 현장 확인결과 T=8㎝~11.5㎝로 포장되어 있어 폐기물 처리 물량 변경이 있음

수량증감 및 개략 공사비 검토

○ 수량 변경내용

명 칭	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
1. 물끊기공	m	222	-	감) 222
2. 콘크리트 치핑	㎡	-	0.03	증) 0.03	물끊기홈
3. 빗금도색	㎡	118	169	증) 51
4. 임시차선 도색	㎡	-	384	증) 384
5. 차선규제봉 설치 및 철거	개	-	160	증) 160
6. 폐기물 운반 및 처리	ton	1,210	1,500	증) 290

○ 개략 공사비 : 당초 69,989천원 → 변경 74,507천원 (증 4,518천원)

- 도급비 : 당초 32,395천원 → 변경 33,429천원 (증 1,034천원)

- 이전비 : 당초 37,594천원 → 변경 41,078천원 (증 3,484천원)

※ 시설관리공단 검토보고서 제출(2015.10.5.)

검토의견

○ 2015년 서울교 보수공사에 대하여 현장여건을 감안한 물끊기공, 빗금도색, 임시차선도색, 차선규제봉설치, 아스팔트 절삭두께 정산 내용을 반영하여 안전하고 원할한 교통흐름과 교통사고를 방지하고자 함

○ 예산확보방안 : 시설보수과-6246(2015.8.11.)호와 관련 기 보고한 서울교 보수공사 낙찰차액(110,017천원) 범위내에서 정산 설계변경 시행

Ⅲ		처 리 의 견

상기 시설관리공단의 실정보고 및 검토내용과 같이 물끊기공, 빗금도색, 임시차선도색, 차선규제봉설치, 아스팔트 절삭두께 정산 등에 대한 보고사항이 타당하다고 판단되므로 승인 처리하여 조치토록한 후 시공물량 및 공사비 변동사항은 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임 :  1. 현장 실정보고서(시설관리공단) 1부.

2. 의견서(정밀점검업체) 1부.

3. 변경검토내역 및 사진대지 1부.  끝.