투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	'곰사 환경개선공사' 관급자재 조달구매(변경) 요청

1. 조경과-4312(2015.08.18)호와 관련입니다.

2. 『곰사 환경개선공사』 관급자재 조달구매에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 관급자재 조달구매

나. 품    명 : 레미콘

다. 구입내역 - 변경없음

품 명 (식별번호)	규 격	단위	단가	수량	금액	비고
레미콘 (10063090)	25-18-8	㎥	57,170	77	4,402,090
레미콘 (10063102)	25-24-15	㎥	67,120	71	4,765,520
소 계					9,167,610
조달수수료	0.54%		원단위절사		49,500
합 계					9,217,110

라. 변경내역

- 당초 납기일자 : 2015. 10. 10

- 변경 납기일자 : 2015. 10. 30

마. 변경사유 : 추가 공사(안전휀스 설치) 등으로 인하여 공정 변경으로 납품기한 연기.  끝.

	조경과장
주무관	호명옥		주무관	이옥하		조경과장	10/06 강인호
협조자
시행	조경과-5297	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7551	/전송	02-500-7993	/		/	대시민공개