출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	녹색성장과장	설비부장
	이용수	김창균	01/07 박기형

	명에 의하여 2014.01.06.(월) 율곡로 도로구조 개선공사외1개소 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
시 간	13:30 ~ 17:30
건 명	출장결과 보고서(율곡로 도로구조 개선공사외 1개소)
내용	□ 공사개요 ｏ 공 사 명 : 율곡로(창경궁앞)도로구조 개선공사 ｏ 위 치 : 원남사거리~ 창덕궁앞 ｏ 규 모 : 800m(터널 300m) ｏ 사업기간 : 2010.10.11. ~ 2013.12.31. ｏ 시 공 사 : ㈜북일종합건설 □ 보고내용 ｏ 토목공정율 36.01% - 토목분야 터널 터널입·출구 및 내부 디자인 선정완료 구조물 설계변경 외부전문가 심의 - 종묘측 한전 전력구 이설 공사 진행 (70%완료) - 서울시 디자인심의준비, 문화재현상변경 심의준비 ｏ 율곡로 터널 부속시설(전기분야) 설계에 따른 예산협의 - 2014년도 집행예산 협의(시설비 사용) - 토목분야 공사기간 연기에 따른 2014년도 예정공정 계획확인 - 토목분야 공정에 따른 전기분야 예정공정 확인 - 창덕궁방향 건물철거로 인한 도로선형 변경 위치확인. 끝. 출장보고자 : 공업5급 김창균 공업7급 이용수