문서번호	공간정보과-920
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		공간정보과장	시설안전부장
장기덕		정윤홍	10/06 강신재
협조
	주무관		신정민

「’15년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공정 보고회 개최 계획

2015. 10.

상수도사업본부

공간정보과

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공정 보고회 개최 계획

상수도 GIS DB 정확도 개선사업의 내실있는 사업추진을 위하여 10월  공정 보고회를 개최하고자 보고 드림.

□ 용역개요

❍ 사업현황(총 625㎞, 4,656백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 217㎞ (신설 44, 기존 173)	측량 및 편집 : 189㎞ (신설 22, 기존 167)	측량 및 편집 : 219㎞ (신설 44, 기존 175)
용역기간	’15. 4. 1. ～ ’16. 3. 31.	’15. 4. 1. ～ ’16. 3. 31.	’15. 4. 4. ～ ’16. 3. 31.
계약금액	1,420백만원	1,506백만원	1,730백만원
사 업 자	중앙항업㈜ 외 2 [㈜제일항업, ㈜해양정보기술]	공간정보기술㈜ 외 2 [삼아항업㈜, 네이버시스템㈜]	새한항업㈜ 외 2 [범아엔지니어링㈜, 한국에스지티㈜]
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

□ 공정보고회 개요

❍ 일    시 : 2015. 10. 15.(목) 16 : 00 ~

❍ 장    소 : 본부 4층 회의실

❍ 참석대상 : 10명

․ 본  부 : 지리정보과장, 업무담당자(3명)

․ 용역사 : 동남, 서북, 서남 용역(사업책임자, 공정업무 담당자)

❍ 주요 내용

- 10월 추진실적 및 향후 추진계획 등 사업수행 관련사항 보고

- 용역수행에 따른 애로사항 및 작업시 유의사항

- 밀페공간 작업에 따른 현장 안전관리 주의사항 및 업무지시 등

□ 추진실적

❍ 공정현황

(10월 4일 기준 : 단위 ㎞)

구 분		사업목표	조사/탐사	측 량	DB구축	조사/탐사 공정(%)	비 고
계		625	503	404	366	80.4
동 남	소 계	219	161	115	114	73.5
	신 설	44	41	16	15
	기 존	175	120	99	99
서 북	소 계	217	194	162	125	89.4
	신 설	44	36	34	15
	기 존	173	158	128	110
서 남	소 계	189	148	127	127	78.3
	신 설	22	15	6	5
	기 존	167	133	121	122

□ 진행순서

❍ 16:10 ~ 16:45  추진실적 및 현황사항 보고(사업별 각 10분)

❍ 16:45 ~ 17:00  질의응답 및 지시사항 전달

□ 향후계획

❍ 보고회에서 제시된 의견 검토하여 사업에 반영

❍ 중간보고회 개최 : ‘15. 12월(예정).  끝.