함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경에 대한 계약의뢰(노원고교~온수골사거리간 송배수관 정비공사)

우리 사업소에서 시행 중인 송배수관 정비공사에 대하여 설계변경을 시행코자 아래와 같이 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 노원고교~온수골사거리간 송배수관 정비공사

나. 계약업체 : 동신공영(주) 대표 안근모

다. 계 약 일 : 2015.5.19.

라. 공사기간 : 2015.5.22. ~ 2015.11.18.

마. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년

바. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(21102)

사. 설계변경 내역

단위:원

구 분	금 액		증·감액
	당 초	변 경
총공사비	957,725,850	957,725,850	-
도 급 비	284,075,850	262,400,000	감) 21,675,850
관급자재비	200,000,000	270,000,000	증) 70,000,000
도로복구비	473,650,000	425,325,850	감) 48,324,150

붙 임 : 1) 설계변경 시행문 1부.

2) 설계변경 심의결과 보고서 1부.

3) 설계변경 심의요구서 및 검토의견서 1부.

4) 설계변경 사유서 1부.

5) 변경설계서 및 제비율검증 내역서 각 1부.

6) 합의서 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	정기성		지방시설사무관대우	이승완		급수운영과장	전결 10/06 김수영
협조자
시행	급수운영과-19174	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3367	/전송	02)3146-3389	/		/	부분공개(6)