투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	육일전력(주) 대표이사 귀하
(경유)
제목	성동구등 4개구 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 제1차 작업지시 기한 연장통보

1. 기전과-6652(2015. 9.23)호  『성동구등 4개구 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)』 제1차 작업지시와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 당초 사급자재로 교체키로한 점검통로 등기구 및 램프를 관급구매지급코자 작업기한을 아래와같이 연장하오니 작업 전 ․ 후 사진을 첨부하여 작업완료 보고서를 2015.12. 5일까지 작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시 기한 연장

- 당초 2015. 11. 10 → 변경 2015. 12. 5

나. 관급자재 지급

- 전구식 삼파장램프(EFTR20EX) : 300개

- 등기구(직부형) : 50개. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	문준호		기전과장	10/06 최주용
협조자
시행	기전과-6918	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1547	/전송	02-2210-1536	/	munjunhoo@seoul.go.kr	/	대시민공개