문서번호	시설과-5008
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	진병규	10/06 이춘희
협 조

「보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업」

준공기한 연기 검토 보고

2015. 10

동부공원녹지사업소

(시설과)

「보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업」

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업」관련하여 도급사로부터 준공기한 연기요청이 있어 아래와 같이 검토보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업

○ 공사내용 : 식재기반, 수목식재, 휴게시설설치, 데크공사 등

○ 공사기간 : 2015. 08. 12 ~ 10. 10

○ 총공사비 : 금189,599,210원(일억팔천구백오십구만구천이백일십원)

도급액 : 금149,620,210원/ 관급자재 39,979,000원

○ 도 급 자 : ㈜다원녹화건설 대표 김용각

□ 검토내용

○ 연기사유

- 사업대상지 건물이 구조안전진단에는 이상없었으나 준공된지 25년 되어, 1차방수공사후 담수시험 결과 당초 설계시 대상구간이 아닌곳에서 누수가 발생하여, 추가 방수공사 및 담수 시험이 필요함

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2015.8.12. ~ 2015.10.10

- 변경 : 2015.8.12. ~ 2015.10.24

○ 지체상금 부가 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 처리의견

○ 도급사로부터 제출된 준공기한 연기사유가 타당하므로 계약부서에          준공기한 연기 요청하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기요청 공문 1부. 끝.