문서번호	교통정보과-16116
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	교통정보과장
김상곤		차명호	10/06 이경순
협조
	도로정보팀장		최종선

「노후 도로전광표지 성능개선」

자재 공장검수 결과보고

2015.  10. 5.(월)

교통정보과

「노후 도로전광표지 성능개선」

자재 공장검수 결과보고

노후 도로전광표지 성능개선 사업 관련으로 구매자재의 규격 적합여부 확인을 위한 공장검수를 실시하고 결과를 보고 드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 노후 도로전광표지 성능개선

○ 규    모 : 도로전광표지(문자식 600mm×600mm기준) 등 14대

○ 계약기간 : 2015. 8. 6. ~ 2015.12.14(130일)

○ 계약금액 : 567,823,640원

○ 계약업체 : ㈜오라시스템 대표자 김동화

□ 공장검수 및 결과

○ 검수일자 : 2015. 10. 5.(월)

○ 장    소 : 공장(성남시 상대원동)

○ 검 수 자 : 교통정보과 주무관 차명호, 감리원 김문환

○ 준비업체 : ㈜오라시스템 사업관리책임자 박승욱

○ 검수내용

품 명	규 격	설계수량	검수수량	비고
LED CHIP	ES-SAHRPN10DE19UP (적색)	418,816	418,816	EPISTAR
	ES-EEGHA10A (그린)	418,816	418,816	EPISTAR

○ 검수결과 : 자재수입 송장 및 수량 확인결과 제작설치 지침서                    규격에 적합함.

□ 향후계획

○ 2015. 10. 6 ~ 10.16  : LED 램프제작

○ 2015. 10.17~ 10.26   : 모듈 작업

○ 2015. 10.26 ~11.10   : 도로전광표지 함체 조립

○ 2015. 11.11             : 도로전광표지 함체 공장검수

○ 2015. 11.20             : 도로전광표지 설치

○ 2015. 12.10             : 도로전광표지 설치완료

따로붙임 : 자재수입송장 및 공장검수 사진 1부. 끝.