문서번호	토목부-20857
결재일자	2015.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
심규진		서관석	10/06 노우성
협조	주무관		오열상
	주무관		장기철

램프(A,B) 개통구간 시설물 보수 검토보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2015.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

램프(A,B) 개통구간 시설물 보수 검토보고

공사개요

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3.22. ~ 2020. 8.31.

❍ 공 사 비 : 176,826백만원

❍ 시 공 사 : 삼성물산㈜ 외 2개사

❍ 감 리 단 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

보고내용

❍ 검토배경 : 램프(A) 구간 하부에 부설되어 있던 종배수관이 차량하중으로 균열이 발생되어 보수(배수관 상부를 깨고 골재채움 후 다짐)가 필요하며, 램프(B) 연장구간에 아스팔트포장 균열이 발생되어 주행성 및 안정성 확보를 위해 보수(불량구간 평삭 후 덧씌움)가 필요함.

❍ 관련근거 : 월드컵(감리)-402호(2015. 9.21.)

❍ 공사비 증․감 내역

			(단위:천원)
공 종				단위	당 초		변 경		증 감		비 고
					수량	금액	수량	금액	수량	금액
1.종배수관 보강	골재채움 및 다짐			㎥	-	-	78	5,800	78	5,800
2.포장공	Over-Lay			㎡	-	-	773	9,144	773	9,144
공 사 비								14,944		14,944

❍ 단가적용 검토

- 종배수관 :「공사계약일반조건」제20조(설계변경으로 인한 계약금액조정) 제2항에 의거 계약상대자의 책임 없는 사유로 협의율(82.004%)로 적용

- 도로포장 : 시공사의 제안에 의한 추가 공사로「공사계약일반조건」제20조 제1항에 의거 낙찰률(64.008%)로 적용

❍ 위치도 및 현황사진

(램프(A) 종배수관 균열)

(램프(B) 아스팔트포장 균열)

조치계획

❍ 램프(A, B) 개통구간 시설물 보수 실정보고 내용을 검토한 바, 적정하며 램프(A, B) 개통 등 공사의 시급성을 감안하여 시공사가 우선 보수 조치 완료하였으므로 향후 설계변경 시 반영하여 처리코자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.