투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기의뢰(보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업)

1. 시설과-5008(2015.10.6.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업』에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업 관급자재 구매

나. 관급자재 현황

품 명	계약번호	규 격	단위	수량	계약자	비 고
파고라	12142251501	3.6×3.6×3.41m	개소	1	자인
등의자	00148038100	1570×560×730mm	개소	3	자인
종합안내판	00158069000	1200×900mm	EA	1	파란
옥상공원표지판	00158108200	300×350mm	EA	1	오성씨앤디
말라스	00158081001	90×21mm, 말라스	㎡	146	조광목재
금강애기기린초	00145037102	8cm	본	145	우리꽃연구소
소국	00145037102	10.2cm	본	186	우리꽃연구소
억새(그린라이트)	00145037102	10.2cm	본	203	우리꽃연구소
억새(모닝라이트)	00145037102	10.2cm	본	175	우리꽃연구소
억새(무늬)	00145037102	10.2cm	본	52	우리꽃연구소
억새(파랑새)	00145037102	10.2cm	본	145	우리꽃연구소
억새(호피)	00145037102	10.2cm	본	155	우리꽃연구소
좀새풀	00145037102	8cm	본	186	우리꽃연구소
노랑숙근코스모스식생매트	00145037102	390×390×50mm	매	55	우리꽃연구소
억새식생매트	00145037102	340×500mm	매	121	우리꽃연구소
기린초식생매트	00145134501	340×500×40mm	매	61	그린유토피아
꽃잔디식생매트	00145134501	340×500×40mm	매	99	그린유토피아
돌나물식생매트	00145134501	340×500×40mm	매	55	그린유토피아
벌개미취식생매트	00145134501	340×500×40mm	매	88	그린유토피아
세덤혼합식생매트	00145134501	340×500×40mm	매	94	그린유토피아
소엽맥문동식생매트	00145134501	340×500×40mm	매	58	그린유토피아
옥잠화식생매트	00145134501	340×500×40mm	매	64	그린유토피아
원추리식생매트	00145134501	340×500×40mm	매	86	그린유토피아
일월비비추식생매트	00145134501	340×500×40mm	매	138	그린유토피아
좀새풀식생매트	00145037102	340×500mm	매	157	우리꽃연구소
세덤블럭매트	00145099000	500x500	매	80	한국그린인프라연구소

다. 납품기한 변경

- 당 초 : 2015. 10. 16

- 변 경 : 2015. 10. 23

라. 소요예산 : 39,979천원(변경없음)

마. 연기사유 : 선행공정 지연으로 납품기한을 본 공사 일정에 맞추어 납품기한 연기

바. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 준공기한 연기 검토 보고. 1부.  끝.

주무관	최종성		시설팀장	임록화		주무관	이전호		시설과장	10/07 代임록화
협조자	주무관	김일환
시행	시설과-5017	(		)	접수		(		)
우	07062	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소 시설과	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	jongsung79@seoul.go.kr	/	대시민공개