출 장 결 과 보 고 서

주무관		산업기반팀장	경제정책과장		결재
이종권		김국진	10/07 이해우
협 조

서울시립과학관 건립공사와 관련하여 과학관 공사 현장에 출장하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10. 7

보 고 자 : 시설7급 이종권

보 고 내 용
일 시	2015.10.6(화)
건 명	출장결과 보고(서울시립과학관)
내용	▢ 출장개요 ◦ 일 시 : ’15. 10. 6(화) 13:00~ 17:00 ◦ 장 소 : 서울시립과학관 건립공사 현장 ◦ 출 장 자 : 이종권 주무관, 김현수 주무관 ▢ 출장결과 <공정회의 참석자> ◦ 도시기반시설본부 : 김대식(건축), 이기철(전기), 이상협(기계), 임봉규(조경), 정의환(책임감리단장) ※ 이종권(경제정책과), 김현수(시립과학관) <회의내용> ◦ 건축공사 추진계획(도기본) - 2015.10월 : 창호공사 완료 - 2015.11월 : 유리 및 판넬공사 완료 - 2015.12월 : 내부 수장공사 완료 - 2016.02월 : 외부 토목 및 조경공사 완료 - 2016.03월 : 도장공사 완료 ◦ 전시 설비용량에 대해 건축분야와 사전 협의하여 이중시공 방지(도기본) → 전시설비 개략 용량은 11월 중순경 협의 가능(시장 보고후) ◦ 전시 중량물 등 반입 필요시 11월 중순 유리설치 공사전 통보요(도기본) ◦ 각 분야별 예산 집행철저 불용방지(경제정책과) ◦ 시립과학관 사무실 조기 입주 가능토록 공사 진행요(’16년 1월 입주검토) ◦ 2015.6.12.(16:00) 과학관 주민토론회 참석요(도기본 및 감리단장 참석요) <기타사항> ◦ 건축 예산추가 요구 부분 현장 확인 ※ 현재 진행공정 : 골조공사 완료, 지상 1층 실별 칸막이 공사중(조적공사)