함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	변경계약 체결 통보(준공기한 연기)

1. 공사감독2처-15525(‘15.09.25)호 「준공기한 연기 검토보고서 제출」과 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독중인 「용두동 39번지외 3개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 통보합니다.

가. 변경계약내용

계 약 명	당 초	변 경	비 고
용두동 39번지외 3개소 배급수관 정비공사	2015.04.16.~2015.10.12	2015.04.16.~2015.11.11	절대공기 부족으로 인한 준공기한 연기

첨 부 : 변경계약 체결통보(재무과) 1부.  끝.

	동부수도사업소장
★주무관	박현대		시설관리팀장	최재영		시설관리과장	전결 10/07 오기석
협조자
시행	시설관리과-27423	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-3146-2795	/전송	02-3146-2839	/	hd5285@seoul.go.kr	/	부분공개(5)