문서번호	시설보수과-5650
결재일자	2015.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김종범		박용선	10/07 임대성
협조	주무관		나철흠
	주무관		한상신

도로시설물 일상유지보수공사 시행계획

(탄 천 교)

동부도로사업소

(시설보수과)

도로시설물 일상유지보수공사 시행계획

(탄 천 교)

2014년도에 실시한 탄천교정밀점검용역결과 보수 1순위 대상인 “교면방수 및 재포장” 구간 중 바닥판 하면 손상에 의한 포장 파손 발생으로 사고 발생 우려가 높은 구간(P2~P6)에 대한 정비계획 보고임

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 2015 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2015. 2. 27 ~ 2015. 12. 31.

○ 도 급 비 : 1,566백만원

○ 도 급 자 : (합) 목우공영 대표 오영미

2		탄천교 현황

○ 위    치 : 강남구 일원동 833번지(남부순환로)

○ 준공년도 : 1985년

○ 교량등급 : DB-24

○ 교량규모 : 폭 39m, 연장 308.3m160m (편도4차로)

3		시설물 상태

○ 교면포장 불량

- 탄천교 전구간에 걸쳐 아스팔트 포장파손이 빈번하게 발생하여 수시로 긴급보수를 시행하고 있으나, 철근 노출 등 바닥판 손상이 심해 사고가 우려되는 구간(양재방향 P2~P6)에 대한 전면적인 교면방수 및 포장정비가 필요한 실정임

○ 신축이음 누수

- 신축이음 누수로 인해 교량하부 구조 및 받침의 손상 원인이 되고 있는 신축이음(양재방향 P2, P6)은 포장정비 시 일괄 정비가 필요함

4		정비물량 및 개략 공사비

공 종	손상내용	정밀점검 1순위		금회 정비
		수량	공사비(천원)	수량	공사비(천원)
교면포장	교면방수 및 재포장	73a	558,240	18a	125,136
신축이음	신축이음 누수	125m	242,720	50m	97,090
순공사비			800,960		222,226
제 잡 비			360,430		101,584
도 급 비			1,161,390		323,810
관 급 비			78,980		17,840
폐기물처리비			14,540		3,260
총공사비			1,254,910		344,910

5		조치 계획

○ 정밀점검 1순위 정비 대상 중 포장 파손에 의한 사고 발생 우려가 높은 구간(P2~P6)에 대하여는 금년 예산으로 우선 정비 시행하고(344,910천원), 잔여 물량에 대하여는 2016년 예산확보(910,000천원)하여 정비코자 함

○ 정비공사에서 발생하는 폐기물에 대하여는 “2015년 도로시설물건설폐기물처리용역”에 반영하여 처리코자 함(3,260천원)

- 폐아스콘 및 폐콘크리트 운반 136㎥

- 폐아스콘 및 폐콘크리트 처리 32톤

따로붙임 : 탄천교(P2~P6) 정비 설계도서 1부.  끝.