문서번호	물재생과-4178
결재일자	2015.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김재봉	김일운	10/07 가길현
협 조

- 홍제천 및 지천관로 보수공사 -

창릉천 보수계획(비굴착)

2015. 10.

- 홍제천 및 지천관로 보수공사 -

창릉천 보수계획(비굴착)

○ 창릉천 차집관로 보수(비굴착)는 2013년부터 매년 연차적으로 보수하는

사업으로써 창릉천 특성상 비굴착 장비 진입로가 없어 해마다 하천점용허가     신청 및 장비진입로 개설과 원상복구를 반복 하는 실정으로 ,

○ 금년도 하천점용허가 및 장비진입로 개설시 창릉천 잔여구간(573m)에 대한     정비를 마무리하면 장비진입로 개설 및 원상복구비가 절감되므로 공통분야유지보수     낙찰차액 등을 활용하여 창릉천 보수를 마무리하여 오수 누수로 인한           환경오염과 악취 방지에 만전을 기하고자 함.

사업개요

사 업 명 : 2015년 홍제천 및 지천관로 보수공사

사업기간 : 2015. 6. 12 ~ 2015. 12. 11

사업위치 : 창릉천(싸릿말교~지축교 하류), 홍제천(유진상가~KT전화국)

※ 공정율 : 40%(창릉천 : 하천점용허가 신청, 홍제천 : 사업 완료)

사업규모 : 차집관로 비굴착보수(D=450~800mm, L=1,188m)

총사업비 : 529,309천원(공통분야 유지보수 시설비)

추진경위

2014. 12. 20 : 예산확정

2015.  3. 25 : 특허공법 선정심사위원회 개최

2015.  5. 13 : 공사 발주

2015.  9.  8 : 제1차 설계변경(도급비 변경 없음)

현 황

○ 현재 홍제천(UV공법)은 공사가 완료된 상태이나, 창릉천(턴영공법)은       고양시 덕양구청으로부터 하천점용허가를 득하지 못하여 착공을          하지 못한 상태임.(하천점용허가 예정일 : 10. 19)

○ 하천점용허가를 득한후 비굴착 장비 투입을 위하여 임시 차량진입로           개설 및 공사 완료후 원상복구 하여야 함.

문 제 점

○ 하천점용허가를 득하는데 많은 시일(약 60일)이 소요되고, 창릉천은         장비 진입로가 좁아 매년 임시 진입로 개설 및 원상복구에 많은 예산이       투입되는 실정임.(진입로 개설 및 철거 비용 : 약 8,000천원)

○ 창릉천 보수를 2013년부터 연차별로 시행중으로 금년도 보수하면 남은       구간은 약 573m(소요예산 360백만원)로 남은 구간 보수를 위하여           2016년도에 다시 하천점용허가 및 임시 차량진입로 개설과 원상복구를       하여야 함.

창릉천 정비 현황

낙찰차액 – 453,670천원(총예산 4,510,000천원)

(단위:천원)

사업명	예산액	계약금액	낙찰차액	비고
합 계	4,510,000	4,056,330	453,670
차집관거 정비 및 준설공사	1,800,000	1,577,607	222,393
센터시설물 보수공사	2,710,000	2,478,723	231,277

낙찰차액 사용계획

(단위:천원)

연번	정비대상	사용 계획	비 고
낙찰차액		453,670
1	유량조절장치 제작 구매(차집)	123,000	계약완료(티케이데크)
2	유입펌프장 오염토양 정화(토목)	100,000	작업 준비중
3	유입펌프장 오염토양 정화 (토양 반출 검증 및 운반정화처리)	40,000	계약 준비중
4	탈수기동 정밀안전진단	20,000	시행 완료
5	영상 감시 장치 구매	27,000	계약 완료
6	#2 견학로 동판 시험 시공 (이끼 부착 방지)	20,000	계약 준비중
7	차집관로 보수(창릉천)	100,000
소계		430,000	잔액 : 23,670

조치의견

○ 금년도 창릉천 정비시 잔여 구간(지축교~통일교, L=573m)에 대한         정비를 마무리하면 하천점용허가 및 임시 차량진입로를 재설치하지 않아         예산절감 및 오수누수로 인한 환경오염과 악취방지가 가능하므로 창릉천           보수를 마무리 하고자 함.

○ 잔여 구간 정비에 소요되는 예산(360백만원)은 기확보한 관사 리모델링           계획 변경에 따른 예산【260백만원, 물재생과-3256(2015.8.10)】 및        공통분야유지보수 낙찰차액(100백만원)을 활용코자 하며,

○ 공사의 시급성을 감안 우선 시공자로 하여금 공사시행하고 추후 설계변경시       정산(증액)코자 합니다. 끝.