투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	변경계약의뢰(제2처리장 월류웨어 이끼류 방지공사)

1. 물재생과-6507(2015.10.05, 설계변경보고)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여『제2처리장 월류웨어 이끼류 방지공사』설계변경

에 따른 변경계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 제2처리장 월류웨어 이끼류 방지공사

나. 공사기간 : ‘15.07.10~’15.12.12

다. 계약금액 : 110,986,000원

라. 도 급 자 : 주식회사 스페이스씨앤에이코리아 대표 장진호

구 분		당초금액	변경금액	증 감	비 고
총 공 사 비		110,986,000	110,986,000	0	ㆍ공사물량 증대 ㆍ보험료 정산 ㆍ안전관리비정산
도급비	공급가액	100,896,364	100,896,364	0
	부가가치세	10,089,636	10,089,636	0

마. 설계변경내역 (계약금액 변동없음, 물량증대)

바. 설계변경사유 : 계약내역서 적산오류에 따른 계약물량 증대 반영 및

보험료, 안전관리비 등 제경비 정산

사. 예산과목 : 중랑물재생센터운영, 중랑물재생센터수처리유지보수,시설비

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 보험료 등 정산내역서 1부

4. 합의각서 각 1부.  끝

	물재생과장
주무관	정순명		물재생과장	10/07 代안봉용
협조자
시행	물재생과-6582	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장길 3, 64번지	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2550	/전송	02-2211-2579	/	sunmyong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)