함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	활성탄흡착지 2단계 시운전 및 운영방안 의견 제출(공문 접수)

1. ㈜도화엔지니어링 뚝도(CM) 2015-345(2015.10.05)호, “활성탄흡착지 2단계 시운전 및 운영방안 의견 제출” 사항과 관련입니다.

2. 위호로 “뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사”관련 “활성탄흡착지 시운전 및 운영방안 의견”이 접수되었기에 문서접수(접수번호 정수과 - 5162, 2015.10.07)하고, 관련부서(담당자) 검토 후 조치 하고자 합니다.

가. 공문 주요내용

- 고도 정수처리 2단계 시운전 계획

· 활성탄지 산세척 실시 : ‘15. 10. 05 ~ 11. 30

· 활성탄지 여과테스트 실시 : ‘15. 10. 05 ~ 11. 30

· 역세척수 조절밸브 개도 셋팅 및 수질분석 : ‘15. 12. 10 ~ 12. 30

- 활성탄흡착지 운영방안 의견

· 활성탄 흡착지의 장기간 운전정지는 많은 미생물이 축적되는 경향이 있고 전이세공 감소(폐쇄)우려 있으므로 가동율 적게 운영하더라도 전지(22지)운영 의견.

붙임 : 1. 접수 공문 1부.

2. 고도정수처리 2단계 시운전 계획서 1부.

3. 미운영중인 활성탄에 대한 제조사(칼곤사) 의견 1부. 끝.

주무관	이금재		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	10/07 이성재
협조자	정수시설과장	윤종민
시행	정수과-5178	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화		/전송		/		/	대시민공개