문서번호	계량기검정과-2944
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
김성복		代정광식	10/08 한민희
협조
	주무관		정광식

2015년 택시미터 주행검정롤러 일제수리 내역변경 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10

서울시품질시험소

(계량기검정과)

2015년 택시미터 주행검정롤러

일제수리 내역변경 계획보고

택시미터 주행검정롤러의 노후로 인한 수리중 불가피하게 내역변경이 필요 부분을 아래와 같이 보고 및 반영하여 원활한 수리를 진행시키고자 함.

Ⅰ		수리현황

◯ 수 리 명 : 2015년 택시미터 주행검정롤러 일제수리

◯ 수리기간 : 2015. 9. 18 ~ 10. 15

◯ 수리업체 : (주)원일워터테크

◯ 계약금액 : 13,585천원

◯ 수리내역 : 붙 임1 [기기별 세부수리정비내역(변경)]  참고

Ⅱ		수리금액변경

구 분		금 액(원)		증 감
		변경전	변경후
총공사비		금13,585,000원	금13,585,000원	없 음
	공급가액	금12,350,000원	금12,350,000원	없 음
	부가가치세	금1,235,000원	금1,235,000원	없 음
	합 계	금13,585,000원	금13,585,000원	없 음

※ 금액 변경없고, 수리내역변경 함

Ⅲ		주요보고내용(내역변경)

공 종	구분	규격(mm)	수량	변경사유	금액	증감
					(단위:천원)
주행롤러 베어링 교체	기존	16호기(구형) UCP207-4개 UKP211-4개	8개	사용빈도가 많은 4호기로 주행검정시 최근 소음 및 진동이 발견되어 수리변경시행 ※ 사용빈도 4호기 >> 16호기 ※ 철거설치 품은 동일	210	증11
	변경	4호기(신형) UCLF-8개	8개		221
브레이크 디스크 프레임제작 설치	기존	-	-	기존 9호기 프레임(구형) 으로는 디스크 교체가 불가하여 프레임(신형) 제작설치 필요 ※ 9호기를 제외한 나머지는 디스크 프레임(신형)이 설치되어 있음.	0	증76
	변경	9호기 브레이크 디스크 프레임(신형) 제작설치	1식		76
에어라인 점검	기존	2호기 에어라인점검	1식	차후 점검 시행	84	감84
	변경	삭제	-		0
간접노무비 및 경비 등						감3
합 계						0

Ⅳ		조치계획

◯ 위의 보고내용에 따라 수리를 진행.

◯ 수리의 목적에 맞게 진행하되, 수리의 효율성과 안전성 확보하여 진행.

◯ 계약금액 변경없이 수리 추진.

붙  임1 :  기기별 세부수리정비내역(변경) 1부. 끝.

붙 임1.

기기별 세부수리정비내역(변경)

라인 번호	수리정비 내역
1호기	- 베어링 8개(롤러 철거 및 재설치 포함) - 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 체인커플링 케이스 추가 청소 및 도색
2호기	- 롤러작동 조작스위치 1개 - 에어라인 점검(삭제)
3호기	- 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 청소 및 도색
4호기	- 베어링 8개(롤러 철거 및 재설치 포함) 추가
5호기	- 베어링 8개(롤러 철거 및 재설치 포함) - 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 샤프트, 키 분해조립 청소 및 도색
6호기	- 베어링 8개(롤러 철거 및 재설치 포함) - 청소 및 도색
7호기	- 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 청소 및 도색
8호기	- 정비없음
9호기	- 베어링 8개(롤러 철거 및 재설치 포함) - 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) 브레이크 디스크 프레임 제작설치(철거포함) 추가 - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 체인커플링 교체 청소 및 도색
10호기	- 정비없음
11호기	- 정비없음
12호기	- 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 청소 및 도색
13호기	- 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 청소 및 도색
14호기	- 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 청소 및 도색
15호기	- 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 청소 및 도색
16호기	- 베어링 8개(롤러 철거 및 재설치 포함)삭제 - 브레이크 계통 교체(브레이크 마스터 실린더, 캘리퍼, 디스크, 패드, 등) - 브레이크 오일교환 및 공기빼기 청소 및 도색