문서번호	토목부-21116
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
장기철		서관석	10/08 노우성
협조
	주무관		오열상

강교감리원 투입계획 검토보고

(잠실역 버스환승센터 조성사업)

2015. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

강교감리원 투입계획 검토보고

(잠실역 버스환승센터 조성사업)

실시계획인가조건에 잠실호수교(보도교)를 강교로 설치토록 계획되어 있으며, 제작시기가 도래하여 품질확보를 위해 전문성을 가진 강교분야 상주 보조감리원을 투입하고자 함

1		관련근거

❍ 건설기술진흥법 제39조(건설사업관리 등의 시행)

❍ 건설기술진흥법 시행령 제60조(건설사업관리기술자의 배치)

❍ 잠실환(감) 제2015-465호(2015.10. 7.) : 보조(강교)감리원 투입계획 보고

2		용역개요

❍ 용 역 명 : 잠실역 버스환승센터 조성사업 전면책임감리용역

❍ 규    모

- 주 차 장 : 19,797㎡ (환승승강장 8면, 버스주차 23면)

- 보도교량 : 37.9m × 2개소 (잠실호수교)

❍ 용역기간 : 2014. 5.12. ∼ 2016.11.25.

❍ 용 역 비 : 4,630,240천원

❍ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링 외 4개사

3		보고내용

❍ 현황 및 투입사유

- 본 과업에는 강교 감리원 배치계획이 없으나, 버스환승센터 실시계획인가조건에 따른 설계변경으로 보도교량이 강교로 추가반영되어

- 강교제작 시기가 도래함에 따라 품질확보 및 안전관리를 위하여 강교분야의 전문성을 가진 상주감리원 투입이 필요함

- 보도교량 설계현황

구 분	램프교량 연장	강재 사용량	비 고
잠실호수교(성남방향)	37.9m	66.52톤
잠실호수교(잠실역방향)	37.9m	66.52톤
계	75.8m	133.04톤

❍ 배치기간 및 감리비

- 투입기간

투입등급	소요 개월	투입기간	비 고
감리사	․ 제작 및 가조립 : 2.0개월 ․ 도 색 : 0.5개월 ․ 현장조립 : 0.5개월 계 : 3.0개월	‘15.10. ~ ‘16.01. (증 66일)	투입기간은 강판 실제 납품일 기준

- 감리비 : 44,190천원

❍ 배치계획

- 금차(2차분) 감리원 배치계획을 변경하여 감리비 조정없이 보조(강교) 감리원 추가 투입

구 분	당 초	변 경	배치계획
토목 감리원	66일	감 66일	- 시설공사 공정율에 맞추어 조정
강교 감리원	0	증 66일	- 투입예정기간 : ‘15.10.12.~’16. 1.11.

※ 금차(2차분)에 투입예정인 토목감리원을 토목공사 공정율에 맞춰 재조정

4		조치의견

❍ 강교분야 전문성을 가진 감리원 투입이 필요하므로 금회(2차분)에 강교분야 상주 보조감리원을 투입하되

❍ 강교감리원 투입비는 2차분 투입계획을 변경하여 금액변경없이 반영하고자 함.

붙  임 : 감리단 강교감리원 투입계획 1부.  끝.