문서번호	시설관리과-21377
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
황민욱	문용욱	이자원	10/08 이상래

『목동배수지외 10개소 무인경비용역』

설계변경 계획 보고

2015. 10

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『목동배수지외 10개소 무인경비용역』

설계변경 계획 보고

『목동배수지외 10개소 무인경비용역』와 관련하여 우장산제어실을 우리사업소 청사(5종)로 이전 계획이 있어 우장산배수지를 무인경비용역에 추가하고 설계변경코자 함.

관련근거

우장산제어실 이전에 따른 무인경비용역 추가 시행 계획 보고

（시설관리과-21290, ‘15. 10. 7)

용역계약현황

용 역 명 : 목동배수지외 10개소 무인경비용역

계약금액 : 51,244,800원

계 약 자 : 케이티텔레캅(주) 채종진

용역기간 : 2014. 3. 15. ~ 2017. 3. 14.(3년간)

대   상 : 목동배수지외 10개소

용역설계변경내역

변경사유

- 우장산제어실을 우리사업소 청사(5종)로 이전에 따른 우장산배수지 유인배수지 → 무인배수지로 변경됨에 따라 무인경비용역 추가

용역 물량 변경 내역

용역시설	당 초	변 경	증 감	사 유
가압장,배수지	11	12	증 1	우장산배수지 무인경비 추가

용역 설계 변경 내역

[단위 : 원]

구 분	계약금액		증·감	비 고
	당 초	변 경
총용역비	51,244,800	55,618,200	증) 4,373,400	증) 8.53%
계약기간	2014.3.15.~ 2017.3.14	2014.3.15.~ 2017.3.14		변경없음

▶ 2015년도 상수도사업 설계심사 추진계획(재무회계과-1085, ‘2015. 1. 28) 지침에 의거 설계심사 대상공사(용역포함) 중 도급비 10% 이하로 본부 및 본청 계약심사 해당없음

※ 예산집행현황

[단위 : 천원]

구 분	예산액	집행액	집행예상액	예산잔액	비 고
2015년	23,000	11,387	6,405	5,208	1,660천원/월

- 예산비목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

행정사항

사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 신공종 및 물량 증 · 감에 따른 타당성 여부를 심의 후 용역 설계 변경 시행

붙임 1. 용역설계변경내역서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 관련 방침서 1부. 끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱☎3146-4015 담당 : 황민욱☎3146-4023