투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	(주)치산치수 대표 박흥자
(경유)
제목	차집관로시설물 유지보수공사 3차 작업 지시 변경 통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 치산치수2015-16호(`15. 10. 07.)와 관련한 실정보고에 대하여 현장 조사한 바

3. 차집관로 부식맨홀 교체 3건에 대하여 맨홀 신설 3건으로 작업 지시변경을 통보하오니, 서울시 전문(공사)시방서에  의거 철저히 시공하고, 공사 중 안전관리와   품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

4. 또한 작업완료 후 전.중.후 사진을 첨부하여 작업완료보고서를 제출하여 주시기 바랍니다

- 아     래 -

가. 지시일자 : 2015. 9. 17

나. 작업기간 : 2015. 9. 17 ~ 11. 20

다. 작업위치 : 청계천 용답역 하류부

라. 작업지시 변경

연번	하천명	규 격	위 치	당초작업지시	작업지시 변 경	비고
23	청계천 (좌안)	3.3*2.8	용답역 하류 (상부물막이부분)	차집관로 부식맨홀 교체	차집관로 맨홀신설
24	청계천 (좌안)	3.3*2.8	용답역 하류 (하부물막이부분)	차집관로 부식맨홀 교체	차집관로 맨홀신설
25	청계천 (좌안)	3.3*2.8	용답역 하류 (점검구 부분)	차집관로 부식맨홀 교체	차집관로 맨홀신설

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		주무관	최승룡		물재생과장	10/08 代안봉용
협조자
시행	물재생과-6627	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개