“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	총인시설 설계용역 유량 및 수질조사 계획변경 검토보고

1. 한국종합 2015-08-274(’15.8.17), 도화(수도)-2015-A20-1443(’15.9.30)호와 관련입니다.

2. 4개 물재생센터 3차(총인)시설 설치사업 기본 및 실시 설계용역관련 과업내용서에 4개절 유량 및 수질조사 결과를 반영토록 하였으나, 한강녹조 발생등을 고려 용역기간 단축 추진으로,

3. 과업기간내 4개절 수질조사 결과 반영이 어려움에 따라 다음과 같이 조사기간을 변경 반영하고자 합니다.

가. 조사기간 변경내용

구 분		1차	2차	3차	4차
당초	4개센터	2015년 가을	2015년 겨울	2016년 봄	2016년 여름
변경	중랑,탄천	2015년 여름~가을	2015년 여름~가을	겨울 (’15.12~’16.2)	2016 3~5월 (겨울→봄 수질악화시기)
	난지,서남	2015년 가을	2015년 가을	겨울 (’15.12~’16.2)	2016 3~5월 (겨울→봄 수질악화시기)

끝.

전문관	이창하		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	10/08 이철해
협조자
시행	물재생시설과-1898	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3824	/전송	2133-1043	/	changha@seoul.go.kr	/	대시민공개