문서번호	방재안전시설부-271
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재안전시설부장
송민영		代오수양	01/07 박종웅
협 조
	조경시설과장			신용우
	주무관			윤익진

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

대체 축구장 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01

도시기반시설본부

방재안전시설부

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』

대체 축구장 검토보고

『서남물재생센터 시설현대화사업과 관련하여 시설현대화사업』과 관련하여 사업 부지에 포함되어 기존 축구장 폐쇄로 인한 민원발생으로 조성되는 대체 축구장 설치에 대한 검토 보고임.

사 업 개 요

○ 위   치 : 강서구 마곡동 91번지(서남물재생센터 내)

○ 규    모 : 고도처리시설 개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일

○ 공사기간 : 2009. 11. 09 ~ 2015. 08. 09

○ 총사업비 :  278,624백만원

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1

○ 시 공 사 : (주)대림산업 외5

실정보고내용

○ 관련근거 : 물재생시설과-12430(2013.9.17.) 대체 축구장 조성방안 통보

- 도화(서남)2013-237(2013.12.13.) : 대체 축구장 실정보고

- 도화(서남)2014-4(2014.01.02.) : 대체 축구장 포장(마사토) 시험결과보고

○ 보고내용

- 기존축구장 현황

ㆍ위    치 : 1처리장 1, 2계열 남서측

ㆍ규    모 : 100m × 60m

- 대체 축구장 현황

ㆍ위    치 : 2처리장 동쪽 끝단 녹지

ㆍ규    모 : 91m × 63m

ㆍ공사기간 : 2013. 11.1 ~ 2014. 1. 6

- 대체 축구장 설계내용

ㆍ축구장 중앙을 기점으로 종 횡방향으로 0.5% 구배로 설계

ㆍ단면 두께 500mm【마사토 200mm, 모래 100mm, 쇄석(배수)층 200mm】

ㆍ계획부지내 지장수목 이식 및 제거

ㆍ당초 마곡지구 재생수 공급시설 현장 발생토사(마사토)로 포장 예정이었으나 발생토사에 황토가 포함되어 있어 국가공인시험기관(SGS건설시험연구원) 시험의뢰 결과 투수계수가 부적합하여 외부 마사토 활용

- 설계수량

공 종	규 격	단위	수량	비고
토 공
터파기 및 되메우기		㎥	2,152
2. 배수공
맹암거 부설	D= 250㎜	m	874
우수관 부설	D= 300㎜	m	94
측구수로 설치	B= 300㎜	m	30
3. 포장공
마사토(양질토)	T= 200㎜	㎥	1,215	할증 6%
모래포설	T= 100㎜	㎥	608	할증 6%
쇄석포설	Ø 25mm, T= 200㎜	㎥	1,192	할증 4%
4. 조경공
교목이식		주	42	물국협의 분
교목제거		주	96
5. 부대공
휀스설치	H= 5~7m	경간	154
축구골대	7,320mm×2,440mm	조	1
간이화장실	포세식	개소	1

- 공사비 증감

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증 감
	수량	금액	수량	금액
토 공	1식	-	1식	5,000	5,000
배 수 공	1식	-	1식	37,300	37,300
포 장 공	1식		1식	72,800	72,800
조 경 공	1식		1식	21,600	21,600
부 대 공	1식		1식	147,900	147,900
직접공사비				284,600	284,600
제 경 비	1식		1식	63,600	63,600
부 가 세	1식		1식	34,800	34,800
공사비계				383,000	383,000

책임감리 검토의견

- 대체 축구장 설치는 민원에 의한 설계변경 사항으로 공사계약 일반조건 제21조 ④항 4호에 의거 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업에 증액 설계변경 하여야 할 것으로 판단됨.

조치계획

○ 책임감리원이 제출한 실정보고 내용을 검토한바, 본 내용이 공사중 발생된 민원으로 인한 사항으로 증액되는 공사비(383,000천원)는 공사계약조건 21조 ④항 4호 규정에 의거 추후 설계 변경시 증액 반영토록 통보코자 합니다.

첨부 : 감리검토의견 1부(별도첨부).   끝.