문서번호	정보시스템담당관-11362
결재일자	2015.10.8.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정보자원관리팀장	정보시스템담당관
김광중		현창기	전결 10/08 서병철
협조
	주무관		김선애

- 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 -

주 간 업 무 보 고

(2015.09.27.~2015.10.03, 31주차)

2015. 10.

정 보 기 획 관

(정보시스템담당관)

『 2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수 사업 』

주간업무 보고

(2015.09.27. ~ 2015.10.03.)

『2015년 서울시 공통행정시스템 통합 유지보수』사업 주간업무(31주차) 보고입니다(계약번호 : 20150318153).

Ⅰ		사업개요

사업기간 : 2015. 3. 1. ~ 2015. 12. 31.

*********************

*******************

과업개요

❍ 기 운영하고 있는 공통행정시스템(31종)에 대한 유지보수

❍ 공통행정시스템 기능개선 및 보완개발

❍ 공통행정시스템 보급·공동활용 지원 및 운영체계 개선

❍ 기반 소프트웨어(미들웨어, 검색엔진 등) 및 개발 플랫폼 유지보수

Ⅱ		주간업무 보고

추진실적(30주차)

❍ 추진기간 : 2015. 9. 27. ~ 2015. 10. 3.

❍ 투입현황 : 총 57M/M중 40.58M/M(이전 : 39.69M/M)

❍ 유지보수 처리실적

구분	과업 요청(건수)		과업 완료(건수)		전체 처리 비율(%)	처리 비율(%)
	총누계	요청	총누계	처리
********	1013	16	1013	16	*****	*****
*******	3	0	3	0	*****	*****
*******	156	7	156	7	*****	*****
**********	61	2	61	2	*****	*****
*	*****	**	*****	**	*****	*****

사업 진척도

❍ 추진기간 : 2015. 9. 27. ~ 2015. 10. 3.

연번	구분		추진기간	단계	진척율		차주 계획	비고
					계획	실적
1	통합 유지보수		‘15.03.01.~12.31.	유지관리	71%	71%	73%
2	서비스수준협약 체결		‘15.04.01.~04.30.	완료	100%	100%	100%
3	기능개선	일정관리시스템	‘15.04.01.~06.30.	완료	100%	100%	100%
			‘15.08.01.~10.31.	개발	69%	69%	76%	추가/확대
4		품질시험관리시스템	‘15.05.18.~06.30.	완료	100%	100%	100%	전체일정 4.1.~11.30.
5		시민표창관리시스템	‘15.06.15.~10.31.	개발	73%	73%	77%
6		방문민원 온라인화(3종)	‘15.06.22.~10.31.	개발	73%	70%	73%
7		자율위생점검관리시스템	‘15.07.21.~08.14.	완료	100%	100%	100%
8		전자설문및퀴즈관리시스템	‘15.08.01.~09.30.	완료	100%	100%	100%
9		환경영향평가관리시스템	‘15.09.01.~11.15.	설계	40%	40%	45%
10		하이보드(게시판공통모튤)	‘15.09.15.~11.30.	분석	25%	25%	33%
11	시스템 정기점검		‘15.03.01.~12.31.	유지관리	71%	71%	73%
12	기타	인터넷민원신청및증명발급시스템(GPKI모듈 : 멀티브라우저 적용)	‘15.04.13.~04.24.	완료	100%	100%	100%	적용테스트 4.27.~5.1.
13		온라인민원 개선과제 (반응형 웹)	‘15.07.13.~08.31.	완료	100%	100%	100%
14		재무회계시스템 리포팅서버 이전	‘15.08.10.~10.09.	개발	100%	97%	100%
15		우편번호 변경에 따른 주소DB 생성	‘15.08.10.~08.31.	완료	100%	100%	100%
16		포털사이트 민원검색에 따른 온라인민원 기능개선	‘15.09.14.~09.25.	완료	100%	100%	100%
17		학술용역 및 기술심의용역관리시스템(정책연구자료 통합 플랫폼 구축 연계)	‘15.10.01.~10.31.	분석	10%	10%	22%

※ [붙임] 상세 추진실적 및 금주 계획 참조

붙 임 : 1. 상세 추진실적 및 금주 계획 1부.

2. 주간업무 현황보고서 1부.

3. 유지보수 대장 1부.

4. 유지보수 산출물 1부.  끝.