문서번호	기전설비2과-81
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전설비2과장	시설부장
최연호	김두석	전결 01/07 차광재

- 망원초록길 조성공사 -

실정보고사항 검토결과 보고

(거푸집 및 그루빙 예산절감 사항)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01.

한강사업본부 시설부

(기전설비2과)

- 망원 초록길 조성공사 -

실정보고사항 검토결과 보고

(거푸집 및 그루빙 예산절감 사항)

망원초록길 조성공사 추진 중 감리단으로부터 거푸집 공법 변경 등을 통한 예산절감 사항에 대한 실정보고가 있어 이에 대한 검토결과 보고임

Ⅰ		공사개요

○ 공사기간 : (총괄)'10.1.6 ~ '14.6.30, (4차)’13.1.25 ~ ’14.2.28

○ 총공사비 : (총괄) 25,320백만원, (4차)8,271백만원

○ 공사규모

- 초록길 조성 : 폭 50m,  상부공원 조성 : 5,400㎡

- 강변북로 지하화 : 총 연장 305m (지하차도 50m, 옹벽 255m)

Ⅱ		실정보고 내용

□ 관련문서 : 망원감 제14-4(2014.1.6)

□ 실정보고 내용

○ 거푸집 공법 변경을 통한 예산절감

- 변경내용 (구조물 거푸집)

• 당 초 : 지하차도 구조물 전체 합판거푸집 적용

• 변 경 : 지하차도 구조물 중 벽체 등 직선구간은 유로폼 적용,

상부슬래브 등 유로폼 적용불가 구간은 합판거푸집 적용

- 변경사유 : 유로폼이 합판거푸집에 비해 경제적이며 시공성, 품질관리에서 유리함

- 변경내역

(금액단위 : 천원)

공종	단위	수량			공사비
		당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
합판거푸집(3회)	㎡	10,915	4,983	감)5,932	241,000	110,300	감)130,700
유로폼	m	-	5,932	증)5,932	-	101,600	증)101,600
계		10,915	10,915	-	241,000	211,900	감)29,100

○ 미끄럼방지 그루빙 공종 삭제에 따른 예산절감

- 변경내용

•당 초 : 3단계 지하차도 공사를 위한 가도 진출입부(L=124m+116m) 구간 및 지하차도 상부 우회도로 내리막구간(L=70m)에 미끄럼방지를 위한 그루빙 적용

•변 경 : 그루빙 공종 삭제

- 변경사유

•3단계 지하차도 가도구간은 평면 및 종단선형 상 차량의 안전주행에 문제가 없는 것으로 판단되며(’13.3.24일 3단계 가도 개통이후 현재까지 안전사고 발생사례 없음)

•지하차도 상부 우회도로가 본부 방침에 의거 삭제됨에 따라 해당 그루빙 공정 삭제

- 변경내역

(금액단위 : 천원)

공종	단위	수량			공사비
		당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
그루빙 (3단계 가도)	㎡	2,575	-	감)2,575	40,000	-	감)40,000
그루빙 (우회도로)	㎡	245	-	감)245	3,800	-	감)3,800
계		2,820	-	감)2,820	43,800	-	감)43,800

Ⅲ		검토 및 조치의견

○ 본 건은 구조물 거푸집 공법 변경, 미끄럼방지 그루빙 공종 삭제 등을 통해 예산을 절감코자 하는 건으로써, 관련규정 및 현장여건 등을 검토한 결과 적정한 것으로 사료됨에 따라 감리단 실정보고사항을 승인 통보하고 향후 설계변경시 반영토록 조치코자 함

첨부 : 감리단 실정보고서 1부.(따로붙임). 끝.