문서번호	녹지관리과-77
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
김기수		김영준	01/07 이용태
협조
	주무관		최수영

2014년 운동 및 편의시설 확충 · 정비계획

한강사업본부

(녹지관리과)

2014년 운동 및 편의시설 확충·정비계획

한강공원내 노후되고 파손된 운동·편의시설을 정비하고 부족한 공원 시설을 확충하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 휴식공간을 제공하고자 함.

추진방향

○ 시민들의 이용도가 높고 운동 · 편의시설이 부족한 지역을 우선하여 조성

○ 노후 및 훼손상태가 심하고 안전상 교체가 필요한 시설물 중심으로 정비

○ 지속적인 순찰점검 및 보수·정비를 통하여 시민 불편 최소화

사업개요

○ 위    치 : 한강공원 전지역

○ 사업기간 : 2014. 1 ~ 10.

○ 총사업비 : 1,591백만원

○ 사업내용 : 운동 및 체육시설 확충·정비, 교량하부 휴식공간조성,

음수대 · 의자 · 원두막 · 시계탑 등 편의시설 정비

주요사업내용

○ 운동시설 확충 및 정비공사

- 위    치 : 이촌공원 등 11개 공원

- 사 업 비 : 570백만원

- 주요정비내용

· 이촌공원 농구장 조성 및 야외운동기구 설치(서부이촌동 후속대책 관련)

· 양화·반포·광나루공원 축구장 안전사고방지용 비구방지 휀스 설치

· 노후 및 파손된 운동시설물 교체, 운동시설 주변 그늘목식재

○ 공원시설물 보수·정비(연간단가)

- 위    치 : 광나루공원 등 11개 공원

- 사 업 비 : 200백만원

- 주요정비내용

· 운동장(축구장,족구장,게이트볼장 등) 마사토 포설 및 다짐

· 공원시설(운동·편의·놀이시설) 보수정비 및 시설물 도색작업

○ 편의시설 확충 및 정비

- 위    치 : 광나루공원 등 11개 공원

- 사 업 비 : 400백만원

- 주요정비내용

· 노후 음수대 정비 및 교체, 공원내 파손된 의자 교체 및 설치

· 원두막설치 및 휴게공간 조성, 잠실공원 시계탑설치

○ 교량하부 휴식공간 조성

- 위    치 : 양화대교 하부 등 10개공원

- 사 업 비 : 200백만원

- 주요정비내용 : 교량하부 평상 및 휴게공간 조성

○ 그늘쉼터 조성

- 위    치 : 여의도, 잠실 등 5개공원

- 사 업 비 : 221백만원

- 주요정비내용 : 한강 산책로변 그늘휴식공간 조성 및 그늘목 식재

예산활용계획

○ 2014년 운동 및 편의시설 확충·정비 총사업비  : 1,591백만원

사 업 명	사 업 비(천원)
	계	설계비	공사비
합 계	1,591,000	20,000	1,571,000
운동시설 확충 및 정비	570,000	20,000	550,000
공원시설물 보수·정비(연간단가)	200,000	자체설계	200,000
편의시설 확충 및 정비	400,000	자체설계	400,000
교량하부 휴식공간조성	200,000	자체설계	200,000
그늘쉼터 조성	221,000	자체설계	221,000

○ 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리   및 개선, 한강공원 이용시설 보수‧정비, 시설비

※ 운동시설 확충 및 정비공사는 운동시설(농구장,체육시설), 휴게시설(쉼터조성), 기반시설(배수로,산책로조성) 등 주변경관과 조화된 복합적인 녹지공간으로 조성됨에 따라 자체설계에 어려움이 있어 설계용역으로 추진하고자 함.

추진일정

○ 2014. 1 ~ 2    : 대상지 현장조사(각 센터별 협의), 사업별 계획수립

기술용역타당성심사(기술심사담당관)

○ 2014. 2 ~ 4    : 설계용역시행 및 계약심사, 하천점용허가(국토관리청)

○ 2014. 4 ~ 10   : 공사발주 및 시행   끝.