문서번호	시설관리과-451
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김대용	이철구	01/07 이시우
협 조

설계변경(3차) 심의 결과 보고

(2013년 동부 관내 긴급누수 복구공사)

2014. 1

동부수도사업소

(시설관리과)

설계변경(3차) 심의 결과 보고

명에 의거 2013년 동부 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)에 대한 설계변경 심의결과를 아래와 같이 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사보  김 대 용 (인)

동부수도사업소장 귀하

□ 공사개요

1. 공 사 명 : 2013년 동부 관내 긴급누수 복구공사 (장기계속단가계약)

2. 공사개요 :

구 분	규 격	당초수량	변경수량	증,감
누 수 보 수	13~2,400mm	1,950개소	1,950개소	-
불용관 및 인입관	13~300mm	L=2,310m	L=2,310m

3. 공사기간 : 2013. 7. 11 ∼ 2014. 6. 30

4. 도 급 비

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
도 급 액	2,850,987,710	2,850,987,710	-

5. 도 급 자 : (주)흥일기공 대표 백영숙

6. 심의일시 : 2014. 1. 7(화) 09:10

7. 심의참석자 : 시설관리과장 외 4명

□ 설계변경 세부목록 및 사유

1. 신규공종 : 볼트조임공(D=1,200mm)외 33공종

2. 물량감소 : 아스팔트절단 100~150mm,누수외 9공종

□ 설계변경 심의내용

1. 신규공종 산출 적정여부

2. 설계변경 사항 타당성여부

3. 변경물량 및 단가 적용 등의 적정여부

4. 관련 규정 및 적정성 여부

□ 처 리 의 견

- 설계변경 심의결과 물량변경 및 단가 산정이 접합하므로 설계변경 계약시행코자          합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 및 심의의견서 각 1부. 끝.