문서번호	기전과-294
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	강서도로사업소장
박태진	박재경	01/08 이규상

『오류1 철도건널목 보수공사』

완료에 따른 정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

강서도로사업소

(기전과)

『오류1 철도건널목 보수공사』

완료에 따른 정산 보고

한국철도공사에 공사위탁하여 추진한 오류1 철도건널목 노후 시설물 개량공사가 완료됨에 따라 공사비용을 정산 보고합니다.

관련근거

〇 한국철도공사 수도권서부본부 전기처-150(2014.01.07.)호

- 오류1 건널목 보안장치 보수공사 정산알림

추진경위

〇 2012. 04. 10    오류1 철도건널목 인수(구로구 → 강서도로사업소)

〇 2012. 06. 04    한국철도공사에 위탁관리

〇 2012. 08. 14    오류1 철도건널목 노후 시설물 개량 요청

(한국철도공사 → 강서도로사업소)

〇 2013. 01. 07    오류1 철도건널목 노후 시설물 위탁보수 의뢰

(강서도로사업소 → 한국철도공사)

〇 2013. 12. 18    오류1 철도건널목 노후 시설물 보수공사 준공 (한국철도공사)

공사개요

〇 사 업 명 : 오류1 철도건널목 시설물 보수

〇 위    치 : 서울시 구로구 오류동 221 (오류1 철도건널목)

〇 보수예산 : 159,000천원

- 실 소요금액 : 123,235천원 (잔여금액 35,765천원 반납예정)

〇 공사내용 : 오류1 철도건널목 노후 시설물 개량

- 건널목 제어 유니트 (1대) 및 정류기 기구함 (2대) 교체

- 현수형 경보기 (2기), 전동차단기 (2대) 교체

- 신호정보분석장치(건널목용) 1조 교체 및 케이블 교체 등 부대공사

〇 공사기간 : 2013. 06. 03 ~ 2013. 12. 18 (준공 : 2013.12.18.)

〇 추진방법 : 철도안전 전문기관인 한국철도공사에 위탁공사 의뢰하여 개․보수 추진

공사비 정산내역

〇 총공사비 지급금액 : 159,000,000원

〇 공 사 완 료 금 액 : 123,234,167원

〇 공사비 반납금액 :  35,765,833원

〇 공사비 세부내역

(단위 : 원)

구 분	종 별	세부내용	금 액 (부가세포함)	비 고
실공사비용	공 사 비 용	공사 도급비	68,061,532
		관급비 (지급자재)	33,892,076
	소 계		101,953,608
부 대 비 용	설계비용 및 기타비용	설계수수료	7,920,708
		현장조사 및 공사감독비 등	12,696,551
		감독여비 및 기타 등	663,300
	소 계		21,280,559
합 계		123,234,167

※ 붙임 사업정산조서 및 준공서류 참조

- 관급자재 : 건널목제어유니트 1대, 현수형 경보기 2기, 전동차단기 2대

〇 예산과목 : 도시안전실(도로관리과), 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리,

철도건널목(오류1, 항리3) 위탁관리, 민간이전, 민간위탁금(307-05)

정산금 반납방법

〇 반납(정산)금액 : 35,765,833원

〇 반 납 자 : 한국철도공사 (사업자등록번호 314-82-10024)

- 소재지 : 대전광역시 동구 중앙로 240 (소제동)

〇 반납방법 : 집행잔액(반납금)에 대한 납입고지서에 따른 납부 (세입처리)

- 세입과목 : 일반회계, 세외수입, 임시적세외수입, 잡수입, 기타 잡수입(228-09)

행정사항

〇 관리단속과에 정산금 반납을 위한 반납고지서 발급 의뢰

〇 한국철도공사에 반납고지서 발송

붙임 : 1. 오류1 철도건널목 시설물 보수 계획 1부.

2. 공사비 정산조서(오류1건널목) 1부.

3. 준공서류(오류1건널목) 1부.

4. 준공도면(오류1건널목) 1부.

5. 공사준공 사진대지 1부.  끝.