투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이-신설 도시철도 민간투자사업 시스템감리단 책임감리원
(경유)
제목	보조감리원 투입중지 연장 통보

1.「우이-신설 도시철도 민간투자사업」선행공정(토목·건축) 부진으로 시스템분야 감리원 투입중지 기간을 아래와 같이 연장통보 합니다.

- 아     래-

가. 중지기간 : 당초 2013.1.14 ~ 2014.1.13 (12개월)

⇒ 연장 2013.1.14 ~ 2014.4.13 (15개월)

나. 감리원 투입･중지 내역

구 분		성 명	등급	기 간	비 고
책임감리원		최성길	특급	`12.4.12 〜 현재	투입
보조 감리원 (상주)	송변전/전차선	유하상	특급	‘13.1.14~ ’14.4.13(15개월)	투입중지
	통신/AFC	박수철	고급	‘13.1.14~ ’14.4.13(15개월)	투입중지
비상주 감리원	송변전/전차선	신승호	고 급	`12.5.9 〜 현재	투입
	통신/AFC	최성룡	고 급	`12.9.6 〜 현재	투입
	신호	이기열	고 급	`12.1.9 〜 현재	투입

다. 기타사항 : 중지기간 중 현안사항 발생시 분야별 감리원 투입

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안종필		신호과장	김영하		도시철도설비부장	01/08 정찬웅
협조자	정보통신과장	이용기		송변전과장	김형기
시행	도시철도설비부-175	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7327	/전송	02-772-7308	/	ajp66@seoul.go.kr	/	대시민공개