문서번호	보수과-99
결재일자	2014.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		보수과장	강북아리수정수센터소장
이덕종		안길찬	01/08 박기석
협조
	운영과장		임건혁

여과지 유입 및 퇴수설비 개량 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

강북아리수정수센터

(보수과)

여과지 유입 및 퇴수설비 개량 계획 보고

2014년도 『 여과지 유입 및 퇴수설비 개량』 사업과 관련 장기간 사용에 따른 노후로 성능이 저하된 설비를 신속히 교체하여 양질의 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 현황

○ 시설현황

품명	규격	총댓수	설치년도	용도
유입설비	주철수문 600×600	112 (계열별28대)	1997년	역세척용
퇴수설비	주철수문 650×800	56 (계열별14대)	1997년	역세척용

○ 교체현황

- 기 교체(2013년도)   : 3계열 총42대(유입28대,퇴수14대)

- 금년도 교체        : 4계열 유입 및 퇴수설비

- 2015년이후 교체예상 : 1,2계열분(유입 56대, 퇴수 28대)

□ 사업개요

○ 대상 : 여과지 4계열

○ 사업내용 : 공압식 수문을 전동식 밸브로 개선

○ 규모

- 유입설비 개량 : 전동식 BFV￠450용 28대

- 퇴수설비 개량 : 전동식 BFV￠800용 14대

- 기타 부대설비

○ 사업기간 : 2014. 1. 10 ~ 2014. 6. 30

□ 추진계획

○ 현장조사 및 설계 : 2014. 1. 13까지

○ 본부 설계심사    : 2014. 1. 24까지

○ 발주 및 계약     : 2014. 1. 26 ~ 2013. 2. 10

○ 착공 및 교체작업  : 2014. 2. 13 ~  2014. 7. 25

○ 시운전 및 준공처리 : 2014. 7. 30까지

□ 예산 및 발주방법

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

○ 예산현액 : 700,000천원

○ 사업내용

- 밸브구매비(더블디스크버터플라이밸브)  : 390,000천원

- 공사비(유입및퇴수설비개량공사)    : 310,000천원

○ 발주방법

- 밸브      : 조달구매(MAS 2단계 경쟁)

- 개량공사  : 본부설계심사 후 자체발주(일반경쟁입찰)

□ 기타 행정사항

○ 철거품 고재처리

기존 철거품인 주철제수문 및 부속부품은 재활용이 불가하여 본 개량사업시 내역에 고재처리를 계상반영처리하여 깨끗하고 효율적인 개량사업을 완료하고자 함.  끝.