문서번호	시설보수과-8495
결재일자	2015.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식	정재현	10/12 노영석

준공기한 연기 검토 보고

(정릉천 2복개구조물 정밀안전진단 용역)

2015. 10.

북부도로사업소

(시설보수과)

준공기한 연기 검토 보고

(정릉천 2복개구조물 정밀안전진단 용역)

우리 사업소에서 시행중인 『정릉천 2복개구조물 정밀안전진단용역』에 대하여 용역사로부터 준공기한 연기 신청이 접수되어 이에 대한 검토 보고 임.

용역개요

○ 용 역 명 : 정릉천 2복개구조물 정밀안전진단용역

○ 용역규모 : 복개  B=20.4~39.3m, L=2,466m

○ 용역기간 : 2015. 5. 7. ~ 2015. 12. 2.

○ 계약금액 : 333백만원

○ 용 역 사 : 에스큐엔지니어링(주) 대표 노수종

보고내용

○ 정밀안전진단용역 공기연장 관련 실정보고 제출(SQ엔지니어링, 2015.10.7.)

○ 준공기한 연기사유

- 발주처 추가 과업지시에 대한 현장조사 등 수행기간이 필요하여 준공기한 연기 요청

시설물	추가 과업내용	수행기간	비고
정릉천 2복개	- 재하시험 및 구조검토 1개소	5일
녹천교	- 재하시험 및 구조검토 1개소, 현장조사(받침장치)	4일
창동교	- 재하시험 및 구조검토 1개소, 현장조사(받침장치)	4일

○ 연기요청 일수 : 13일(용역사의 요청에 의한 연기)

- 용역기간 : 당초 2015.5.7. ~ 2015.12.2. → 변경 2015.5.7. ~ 2015.12.15.

조치계획

○ 추가 과업지시에 대한 현장조사 등에 수행기간이 필요하여 준공기한를 연기코자 함.

○ 준공기한 연기

- 당초 : 2015.5.7. ~ 2015.12.2. → 변경 : 2015.5.7. ~ 2015.12.15.

○ 연기사유 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 :  용역사 공문 1부.  끝.