문서번호	설비부-12512
결재일자	2015.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	10/12 박기형

준공기한 연기 검토 보고

- 돈화문 국악예술당 건립공사(전기,통신) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

[설 비 부]

준공기한 연기 검토 보고

- 돈화문 국악예술당 건립공사(전기,통신) -

『돈화문 국악예술당 건립공사』와 관련하여 감리원으로부터 도급공사 및 관급자재 납품기한 연기 요청이 있어 검토하고 아래와 같이 보고드림.

1. 검토근거

○ ㈜영화키스톤건축사사무소 돈화문감 제15-127호(2015.10.08.)호

- 돈화문국악예술당건립 전기,통신공사 및 관급 납기조정 검토 보고

2. 개  요

건 명		전 기 공 사	통 신 공 사	비 고
공사기간	총차	2013.12.23.~2015.10.16.	2013.12.23.~2015.10.16.
	1 차	2013.12.23.~2015.10.16.	2013.12.23.~2015.10.16.
	2차	2014.12.15.~2015.10.16.	2014.12.15.~2015.10.16.
계약금액	총차	금521,954,000	금312,708,000
	1차	금100,000,000	금50,000,000
	2차	금100,000,000	금39,620,000
계약자		삼언전공㈜ 대표 공석복	㈜에스앤티에스 대표 이청대
감 리 사		영화키스톤건축사사무소 대표 김인구

3. 기간연기 검토내용

○ 선행공정 지연으로 공사기간 및 납품기한 조정

○ 책임감리원 검토의견

- 선행공정인 건축공사가 지연되어 후속공정인 전기, 통신공사의 공사기간 및 관급자재 납품기한을 연기함이 적정.

4. 준공기한 연기검토

○ 도급공사 공사기간 변경

구 분			당 초	변 경	비 고
전기공사	공사기간	총차	2013.12.23.~2015.10.16.	2013.12.23.~2015.02.29.	136일 연장
		1 차	2013.12.23.~2015.10.16.	2013.12.23.~2015.10.16.	변경없음
		2차	2014.12.15.~2015.10.16.	2014.12.15.~2015.12.10.	55일 연장
통신공사	공사기간	총차	2013.12.23.~2015.10.16.	2013.12.23.~2015.02.29.	136일(증)
		1 차	2013.12.23.~2015.10.16.	2013.12.23.~2015.10.16.	변경없음
		2차	2014.12.15.~2015.10.16.	2014.12.15.~2015.12.10.	55일(증)

※ 도급금액 변경 없음

○ 관급자재 납품기한 변경

구 분	계약업체	당 초	변 경	비 고
수배전반	㈜동보파워텍	2015.10.16.	2016. 02. 29.	136일(증)
LED조명등	엘이디라이팅(주)
전력및조명제어	로지시스템(주)
디젤발전기	보국전기(주)	2015.11.25.		96일(증)
무대조명장치	제이엠스테이지(주)	2015.12.07.		85일(증)
음향설비	㈜디라직	2015.10.16.		136일(증)
CCTV	이노뎁(주)			136일(증)

※ 계약금액 변경 없음

○ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 보고자 검토의견

○ 감리원의 도급공사 준공기한 및 관급자재 납품기한 연장 보고가 타당한 것으로 판단되어 도급공사 준공기한 및 관급자재 납품기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 1. 전기, 통신공사 및 관급 납기 조정요청 검토 보고 공문 1부.

2. 도급 시공사 및 관급업체 공문 각 1부  끝.