포장복구공사 준공연기 보고서(광진구 208)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박종대	代박종대	10/12 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-26736

2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속) 감독업무 수행중 준공기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2015. 10.

보고자 : *********************

공사현황

공사명 : 2015년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사

도급자 : ***************

작업지시 현황

작업지시번호	위 치	공사종별	공사기간	비고
광진구*208	**********	신설	‘15.09.01~’15.10.08

보고내용

신축 건물의 포장복구 작업지시건으로 현장에 비계 설치 및 공사 자재가 적치되어 있어 포장복구공사가 어려운 실정임.

보고자 의견

위와같은 실정으로 포장복구 작업을 할 수 있는 여건이 형성(비계철거 및 자재 이동)될 때까지 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

-  당초 공사기간 : ‘15.09.01 ~ ’15.10.08

-  변경 공사기간 : ‘15.09.01 ~ ’15.11.08

붙임 : 연기공문 및 관련사진 1부.  끝.