문서번호	설비부-12523
결재일자	2015.10.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이종근		이달영	10/12 박기형
협조

「여의도 지하 공공보행통로 개선사업(기계공사)」

실정보고사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  10.

도시기반시설본부

(설    비   부)

『여의도 지하 공공보행통로 개선사업(기계공사)」

실정보고사항 검토 보고

「여의도 지하 공공보행통로 개선사업」과 관련, 기계공사에 대한 책임건설사업관리기술자의 실정보고사항 검토 보고임

□ 관련근거

○ 여의도 지하 비밀벙커 활용계획(행정2부시장 방침 제282호, ‘15.8.5)

- 기존 사업(남부순환로 개봉역앞 구조개선공사) 에 포함하여 공사 추진

○ 책임건설사업자 실정보고(남부순환로 개봉역앞 개선공사, ‘15.10.8)

□ 공사개요

○ 환기 및 배수설비 설치

- 환기설비 : 급·배기휀(3,000㎥/h × 4대) 및 닥트·닥트기구 설치

- 배수설비 : 수중펌프(150ℓ/분 × 1대) 및 배수배관 설치

○ 기계공사비 : 48,510천원(제경비, 부가세 포함)

구 분	공사비(원)	비 고
환기설비	36,127,140
배수설비	2,103,330
제경비, 부가세	10,279,530

· 적용단가 : 조사단가에 협의율(86.745%, 토목부 적용) 적용

□ 건설사업관리기술자 검토의견

○ 기계공사에 대한 시공사의 실정보고내용 검토결과 타당함

□ 조치계획

○ 실정보고내용 검토결과 적정한 것으로 판단되어 ‘남부순환로 개봉역앞 구조개선공사’에 반영토록 공사 주관부서(토목부)에 통보하고자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 실정보고 및 공사내역 1부. 끝.