문서번호	도로보수과-9731
결재일자	2015.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김동민		김권일	10/12 조병준
협조

제4차 작업지시 관련 실정보고서

(2015년 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가))

2015. 10.

작업지시 관련 실정보고(제4차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2015.04.08 ~ 2015.12.31

○ 시 공 사 : ㈜다댐디엔씨 대표 김 주 승

○ 도 급 비 : 금242,220,000원

□ 보고내용

○ 도림천로 가드레일 정비(비등급 → SB2등급 개방형)

- 도로보수과-8945(2015.9.16.) 도림천로 가드레일 정비 보고

○ 영등포구 신도림역 중앙버스정류소 횡단보도 개선

- 도로보수과-6271(2015.7.6.) 중앙버스전용차로 기능개선사업(신도림역) 시행 계획

○ 응답소민원접수 사항 및 도로부속물 유지관리대상 보수

- 여의도 시범아파트 앞 시선유도봉 설치 외

○ 2015년 교통사고 잦은곳개선사업 관련

- 도로보수과-7989(2015.8.21.) 특별교통안전진단에 따른 교통안전시설 개선사업   시행 계획

- 도로보수과-9618(2015.10.6.) 2015년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산 재배정   에 따른 사업 추진계획

○ 관할 경찰서 요청 시설물 정비 및 설치 요청

- 양천경찰서 경비교통과-13126(2015.10.3.) 교통안전시설(시선유도봉) 설치요청

○ 보수대상 및 물량

연번	위 치	작 업 내 용	규격 및 지시물량			작업조건		비고
			폭 (m)	연장 (m)	경간,개(㎡)	주간	야간
1	영등포구 도림천로 도림천변 도로	개방형가드레일 설치(노측용)			82	■		경간
2	영등포구 도림천로 도림천변 도로	가드레일 철거			82	■		경간
3	신도림역 -중앙버스전용차로 흐름개선사업	중앙버스정류장 보행통로 설치			148	■	■

연번	위 치	작 업 내 용	규격 및 지시물량			작업조건		비고
			폭 (m)	연장 (m)	경간,개(㎡)	주간	야간
4	양천구 국회대로 신월IC 안전지대 - 양천경찰서	시선유도봉 설치			30	■		3m간
5	양천구 목1동 이마트 출구(2개소) - 120민원	시선유도봉 설치			10	■
6	영등포로타리 IC주변 - 교통사고잦은곳 개선	시선유도봉 설치			64	■
7	양화교 주변 - 교통사고잦은곳 개선	시선유도봉 설치			46	■
8	양천구 중앙로 - 교통사고잦은곳 개선	시선유도봉 설치			8	■
9	양천구 중앙로 - 교통사고잦은곳 개선	무단횡단금지시설 철거		22		■
10	구로구 개웅초교 앞 - 교통사고잦은곳 개선	시선유도봉 설치			16	■
11	영등포구 여의도 시범아파트 16동 앞 – 120민원	시선유도봉 설치			10	■
12	영등포구 여의도 리첸시아 아파트 출구 - 120민원	시선유도봉 설치			10	■
13	강서구 공항대로 663 골드서울호텔 앞	시선유도봉 설치			10	■
14	강서구 653-30 호텔리버파크 앞	시선유도봉 교체			25	■
15	강서구 공항대로 641	시선유도봉 교체			6	■
16	공항대로 653 오일뱅크 앞	시선유도봉 교체			6	■
17	공항대로 479 예원교회 앞	시선유도봉 교체			5	■
18	구로거리공원 오거리 주변	시선유도봉 설치 및 교체			8/12	■

□ 조치계획

○ 위 보수대상을 도로,교통안전부속물 유지보수(연간단가) 업체에 작업지시하여 보수코자하며 추후 설계변경시 정산처리하고자 합니다.

- 건    명 : 2015년 도로,교통안전부속물 유지보수공사-제3차 작업지시

- 작업위치 : 영등포구 도림천로 도림천변 외 16개소

- 작업기간 : 2015.10.08 ~ 11.10

- 공종 및 물량 : “별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약55,363천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 원)

공 사 명	도 급 비	기 집행공사비	금회사용 (4차)	비고 (잔액)
2015년 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)	242,220,000	157,894,000	55,363,000	28,963,000

첨  부 1. 제4차 작업지시서 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.

3. 위치도 및 사진대지 1부(별첨). 끝.