문서번호	도시철도설비부-10428
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	송변전과장	도시철도설비부장	도시철도국장
고명규	박동규	정찬웅	10/13 형태경
협 조
	정보통신과장		추경수
	신호과장		代김창환
	주무관		배종수
	주무관		김창환
	주무관		조대근
	주무관		이재영

『9호선 3단계 사업기간 연장에 따른』

시스템분야 책임감리용역(총차) 계약변경 시행 보고

2015. 10. 12.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	☑
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	☑
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	☑
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	☑
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	☑
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	☑
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	☑
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	☑
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	☑	□

『9호선 3단계 사업기간 연장에 따른』

시스템분야 책임감리용역(총차) 계약변경 시행 보고

9호선 3단계 사업기간 연장에 따른 시스템분야 감리원 투입시기 조정 및 감리기간 연장 등 책임감리용역(총차)에 대한 계약변경을 시행코자 함.

용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철9호선 연장건설(3단계) 시스템분야 전면책임감리용역

○ 과업위치 : 송파구 잠실운동장 ~ 올림픽공원 ~ 강동구 둔촌동(보훈병원 앞)

○ 과업범위 : 9호선 연장건설(3단계) 사업구간 시스템분야 책임감리

- 연  장 9.14km, 정거장 8개소(변전실 3개소)

○ 계약현황 : 세종기술(주) 외 2개사 공동수급(분담이행방식)

구 분	용 역 기 간	계 약 금 액	비 고
총 차	2015. 1. 5 ~ 2016. 12. 31	2,901,630천원
1 차	2015. 1. 5 ~ 2015. 12. 31	200,000천원

변경사유

○ 9호선 3단계 사업기간이 22개월 연장 예정(`16. 12월 ⇒ `18. 10월 예정)

○ 선행공정인 토목분야 공정현황과 시스템분야 시설공사 착공을 감안

하여 감리원 실 투입시기 조정

- 토목분야 공정현황(`15. 10 .5 기준)

구 분	평 균	918공구	919공구	920공구	921공구	922공구	923공구
공정율	57.14%	64.92%	41.02%	56.03%	54.70%	64.45%	61.73%
본선터널 관통여부	상 선	완 료	완 료	완 료	완 료	완 료	완 료
	하 선	완 료	시 공 중 (`17.2월 완료예정)	시 공 중 (`15.10월 완료예정)	완 료	완 료	완 료

- 시설공사 계약현황

구 분		계약일자	착공일자	준공기한	계약금액 (백만원)	계 약 자	비 고
송변전	1구간	`15. 8.11	`15. 8.20	`18. 2. 4	5,886	거성일렉콤(주)외 1	918 ~ 920공구
	2구간	`15. 8.25	`15. 9. 2	`18. 2.17	4,703	㈜삼진일렉스	921 ~ 922공구
전차선	1구간	`15. 8.18	`15. 8.24	`18. 2. 8	3,970	(합)동양통신외 1	918 ~ 920공구
	2구간	`15. 8.20	`15. 8.24	`18. 2. 8	4,541	현창전기(주)외 1	921 ~ 922공구
정 보 통 신	1구간	`14.12.31	`15. 1.13	`18. 1.11	5,786	㈜일광기업	918 ~ 920공구
	2구간	`14.12.31	`15. 1.13	`18. 1.11	5,609	㈜일광기업	921 ~ 922공구
신 호		조달청 입찰공고 중(`15.10월중 계약체결 예정)					918 ~ 922공구

변경내용

○ 계약변경 현황

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
총 차	기 간	2015. 1. 5 ~ 2016.12.31	2015. 1. 5 ~ 2018.12.15	연장 23.5개월
	금 액	2,901,630천원	변동사항 없음
1 차	기 간	2015. 1. 5 ~ 2015.12.31	변동사항 없음
	금 액	200,000천원	변동사항 없음

○ 감리용역비 변경현황

구 분	변 경 전	변 경 후	증․감
직접인건비	981,557천원	994,749천원	+ 13,192천원
제 경 비	1,079,713천원	1,094,224천원	+ 14,511천원
기 술 료	412,254천원	417,794천원	+ 5,540천원
직접경비	136,786천원	103,545천원	- 33,241천원
계	2,610,310천원	2,610,310천원	증․감없음
부가가치세	261,031천원	261,031천원	〃
손해보험료	30,289천원	30,289천원	〃
합 계	2,901,630,000원	2,901,630천원	〃

- 투입 감리원 증가로 직접인건비, 제경비, 기술료 증가

- 현지 차량 대수 및 사무보조원 투입 인원 감소로 직접경비 감소

○ 감리원 실 투입시기 조정현황

- 조정전 : `15.1.5 ~ `16.12.31(24개월)

- 조정후 : `15.9.1 ~ `18.12.15(39.5개월 – 연장 15.5개월)

○ 투입인원 변경현황 : 증 4.126인(307인 ⇒ 311.126인)

구 분		등급	변 경 전		변 경 후		증․감		비 고
			투입기간	투입인원	투입기간	투입인원	투입기간	투입인원
책임감리원		특급	24개월	31.824인	39.5개월	49.254인	+15.5개월	+17.430인
안전감리원		고급	24개월	24.000인	12개월	11.269인	-12개월	-12.731인
전 기	보 조 감리원	고급	24개월	24.000인	39.5개월	37.125인	+15.5개월	+13.125인	송변전
		중급	24개월	20.952인	12개월	9.837인	-12개월	-11.115인	송변전
		고급	24개월	24.000인	39.5개월	37.125인	+15.5개월	+13.125인	전차선
		초급	24개월	18.840인	12개월	8.845인	-12개월	-9.995인	전차선
	비상주	고급	24개월	17.544인	30개월	14.970인	+6개월	-2.574인
정 보 통 신	보 조 감리원	고급	24개월	24.000인	39.5개월	37.125인	+15.5개월	+13.125인
		고급	24개월	24.000인	17.5개월	16.404인	-6.5개월	-7.596인
		중급	20개월	17.106인	12개월	9.877인	-8개월	-7.229인
	비상주	고급	24개월	13.009인	30개월	9.062인	+6개월	-3.947인
신 호	보 조 감리원	고급	24개월	24.000인	37.5개월	35.262인	+13.5개월	+11.262인
		고급	22개월	22.000인	17.5개월	16.404인	-4.5개월	-5.596인
		중급	12개월	10.443인	12개월	9.877인	0개월	-0.566인
	비상주	고급	24개월	11.282인	28개월	8.691인	+4개월	-2.591인

- 안전감리원 실 투입기간(`17.1.1 ~ 12.31)

※ 안전감리원 미 투입기간은 분야별 보조감리원이 안전관리업무 대행

【전력시설물 공사감리업무 수행지침(지식경제부고시 제2012-210호) 제48조 제②항】

∙ 분야별 보조감리원을 안전담당자로 지정하여 공사업자의 안전관리자를 지도․감독 할 수 있음.

- 비상주감리원 10개월 투입중지(`18.1.1 ~ 10.21)

※ 비상주감리원 미 투입기간은 책임감리원 및 분야별 보조감리원이 업무 대행

【전력기술관리법 운영요령(산업통산자원부고시 제2014-106호) 제25조 ③항】

∙ 감리원 1명 이상을 총 공사기간동안 상주 배치하는 경우에는 비상주감리원을 배치하지 아니할 수 있음.

○ 현지 차량 및 사무보조원 투입시기 조정(`15.10.16 투입예정)

- 현 지 차 량 : 감 10대(48대 ⇒ 38대)

- 사무보조원 : 감 10인(48인 ⇒ 38인)

조치계획

○ 계약금액 변경 없이 용역기간만 변경하여 총차 변경계약 체결.

○ `15.11월 중 2차 감리용역에 대한 계약을 체결하여 시스템분야 건설이

원활하게 추진될 수 있도록 감리업무수행.

붙임 : 1. 시스템분야 감리원 변경 투입계획(총차 - 1회) 1부.

2. 시스템분야 책임감리용역 변경계약 내역서(총차 - 1회) 1부.  끝.