투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)건축사사무소 기오헌 대표이사 이은식
(경유)
제목	북부여성창업플라자 조성공사 기본설계 성과품 제출 요청

1. 귀사에서 수행 중인 아래와 같은 『북부여성창업플라자 조성공사 설계용역』의 기본설계 남품기한이 지났음에도 성과품이 제출이 되지 않아 사업추진에 지장을 초래하고 있음을 알려드리니 조속한 시일 내에 납품하여 주시기 바라며, 용역지연 관련 지연된 사유, 단축방안 및 예정공정표를 작성하여 우선적으로 2015.10.16.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 용역 준공기한 내 용역을 완성하지 아니한 경우에는 지연배상금이 부과됨을 알려드리니 이점 유념하시기 바랍니다.

가. 북부여성창업플라자 조성공사 설계용역

○ 기본설계 납품일 : 2015. 8. 30.

○ 준공기한 : 2015. 11. 13.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김희태		건축관리과장	곽동호		건축부장	10/13 안재혁
협조자
시행	건축부-11593	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개