투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품 기한 연기 요청(돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사)

1. 설비부-12597(2015.10.13.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인『돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사』에 소요되는

관급자재에 대하여 아래와 같이 납품 기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품 기한 연기 내용

품 명	납품요구번호 (계약번호)	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비 고
				당 초	변 경
지열히트펌프시스템	12142178700	가진기업㈜	190,800,000	2014.04.30.~2015.10.16.	2014.04.30.~2016.02.29.	▸136일 연기 ▸계약금액 변경없음
자동제어	12142178700	로지시스템㈜	152,020,000	2015.05.22.~2015.10.16.	2015.05.22.~2016.02.29.
공 기 순환기	121523625300	㈜에어패스	16,041,700	2015.07.21.~2015.10.16.	2015.07.21.~2016.02.29.
공 기 조화기	121523604100	㈜에스앤에이치이엔지	22,695,000	2015.07.20.~2015.10.16.	2015.07.20.~2016.02.29.
무대기계장치	12152176100	한국기계공업협동조합 연합회	70,000,000	2015.08.28.~2015.10.16.	2015.08.28.~2016.02.29.

나. 연기 사유 : 선행 공종 지연에 따른 관급자재 납품 시기 미도래

다. 납품 연기 귀책 사유  : 본부

라. 지체상금 부과 여부    : 미부과

따로붙임  1. 방침서 1부

2. 합의 각서 5부.  끝.

	설비부장
주무관	박경철		시책사업과장	임현근		설비부장	10/13 박기형
협조자
시행	설비부-12621	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(6)