문서번호	설비부-12597
결재일자	2015.10.13.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
박경철	임현근	전결 10/13 박기형

‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사’

관급자재 납품 기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

설비부

‘돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사’

관급자재 납품 기한 연기 검토 보고

『돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사』와 관련하여 관급자재 납품기한 연기를 위한 검토 사항을 보고드림

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 돈화문 국악예술당 건립 기계설비 공사

❍ 공사규모 : 지상1층/지하3층(연면적:1,778㎡) 기계 및 소화설비 공사 1식

❍ 공사기간 : 2013. 12. 23. ~ 2016. 02. 29.

❍ 공사금액 : 706백만 원(1차:100백만 원, 2차:100백만 원)

❍ 시 공 사 :  ㈜일성이엔지-기계, 대월기전(주)-소방

❍ 감 리 단 : ㈜영화키스톤건축사사무소

2		관 련 근 거

❍ 돈화문감 제15-128호(2015.10.08.) 및 130호(2015.10.12.)

- 지열히트펌프 시스템 구매설치 외 4건 납기 조정 요청

3		관급자재 구매 현황

자 재 명	수 량	계약업체	계약금액(천원)	납품기한	비 고
지열히트펌프시스템	1식	가진기업㈜	190,800	2015.10.16.
자동제어	1식	로지시스템㈜	152,020	2015.10.16.
공기순환기	1식	㈜에어패스	16,041	2015.10.16.
공기조화기	1식	㈜에스앤에이치이엔지	22,695	2015.10.16.
무대기계장치	1식	한국기계공업협동조합 연합회	70,000	2015.10.16.
냉·난방기	1식	엘지전자㈜	20,862	2016.02.16.

4		검토 보고 내용

❍ 납품 기한 연기 내용

품 명	납품요구번호 (계약번호)	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비 고
				당 초	변 경
지열히트펌프시스템	12142178700	가진기업㈜	190,800,000	2014.04.30.~2015.10.16.	2014.04.30.~2016.02.29.	▸136일 연기 ▸계약금액 변경없음
자동제어	12142178700	로지시스템㈜	152,020,000	2015.05.22.~2015.10.16.	2015.05.22.~2016.02.29.
공 기 순환기	121523625300	㈜에어패스	16,041,700	2015.07.21.~2015.10.16.	2015.07.21.~2016.02.29.
공 기 조화기	121523604100	㈜에스앤에이치이엔지	22,695,000	2015.07.20.~2015.10.16.	2015.07.20.~2016.02.29.
무대기계장치	12152176100	한국기계공업협동조합 연합회	70,000,000	2015.08.28.~2015.10.16.	2015.08.28.~2016.02.29.

❍ 연기 사유

- 선행 공종(건축/토목) 지연에 따른 관급자재 납품 시기 미도래

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 감리단 검토 의견

- 선행 공종(건축/토목) 지연으로 인한 납품 기한 연기 요청 사항으로 요청 내용이

적정하다고 사료됨.

5		보고자 의견

❍ 감리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에 맞게  적기에 납품될 수 있도록 납품 기한을 연기 조치하고자 함.

따로붙임 : 관급 자재 납품기한 연기관련 문서 1부.  끝.