문서번호	방재시설부-13650
결재일자	2015.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★조경시설과장	방재시설부장
임봉규		代김달용	10/13 임춘근
협조	광역도로과장		진재섭
	주무관		이한규

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

(조경) 감리사 실정내용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

〔방재시설부〕

『남부순환로(개봉역앞)구조개선공사』

감리사 실정내용 검토보고

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 관련, 보도신설구간 띠녹지 조성

(구로구 요청사항)등에 대한 감리사 실정보고 검토결과임.

Ⅰ		관련문서

○ 남부감 제15-351(2015.10.07)호

⇒ 교통체계개선관련 조경공사 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

○ 위    치 : 구로구 개봉동 198-1일대(개봉역앞 남부순환로)

○ 규    모 : 지하차도설치 - 폭4차로  연장 736m

남.북측 측도 - 폭2~3차로 연장 2,280m

○ 공사기간 : 2007.09.10 ~ 2015.10.31

○ 도 급 액 : 45,946백만원 (조경890백만원)

○ 시 공 사 : (주)케이에스씨건설(60%), 대우조선해양건설(주)(40%)

○ 감 리 사 : (주)동명기술공단, (주)동일기술공사

○ 조경공사

- 수목식재 : 교목 ~ 소나무외 4종214주, 관목 ~ 회양목외 8종68,653주

- 수목이식 : 교목 ~ 소나무외 15종 343주, 관목 ~ 철쭉외 17종6,250주

Ⅲ		실정내용 및 검토결과

구 분	실정보고(감리)	검토결과	비 고
수목 식재, 이식	◦ 공사 시점부 보도신설 구간 가로수 식재 (하부식재포함) · 왕벚나무(H4.0*B12) 19주 · 회양목(H0.3*W0.3) 468주 · 화살나무(H0.8*W0.4)144주 ◦ 공사시점부 사면 식재수종 변경 · 산철쭉(H1.3*W0.3) 3,740주 자산홍(H1.3*W0.3) 3,310주 → 황매화(H1.0*W0.4) 3,525주 ◦ 개봉역앞 녹지대 U턴차로 신설로 인 한 기존 수목(관목) 이식 · 둥근소나무(H1.5*W2.0) 2주 · 회양목(H0.3*W0.3) 550주 · 자산홍(H0.3*W0.3) 1,182주 · 산철쭉(H0.3*W0.3) 140주 ◦ 개봉역앞 녹지대 한전변압기 설치로 인한 기존 수목(관목) 이식 · 둥근소나무(H1.5*W2.0) 1주 · 회양목(H0.3*W0.3) 420주 · 자산홍(H0.3*W0.3) 530주 · 산철쭉(H0.3*W0.3) 1,040주	◦ 두산아파트 후문~시점부사면 앞 보도신설에 따른 가로수 식재,시점부 사면 수종교체(구로구 요청사항), 교통체계 개선관련 U턴차로 신설로 인한 개봉역앞 녹지대 수목이식, 한전 변압기 설치관련 수목이식등 타당성있음.

Ⅳ		물량 및 공사비

□ 물량변경내역(전체분)

(단위 : 천원)

구 분	당 초		변 경		증▽감	비고
	주요 내용	금액	주요 내용	금액
식재	- 왕벚나무(H4.0×B12) 98주 - 왕벚나무(H4.5×B15) 27주 - 산수유(H3.0×R12) 6주 - 소나무(H9.0×R35) 12주 - 소나무(H9.5×R40) 12주 둥근소나무(H1.5×W2.0) 28주 공작단풍(H2.0×R2) 13주 - 회양목(H0.3×W0.3)15,860주 - 황매화(H1.0×W0.4) 1,540주 - 산철쭉(H0.3×W0.3) 23,450주 - 자산홍(H0.3×W0.3) 22,470주 - 조팝나무(H0.6×W0.3) 4,780주 - 영산홍(H0.3×W0.3) 1,070주 - 화살나무(H0.8×W0.3) 2,910주 - 개나리(H0.6×3가지) 1,650주 - 사철나무(H1.2×W0.5) 420주 - 맥문동(3-5분얼) 10,550본 - 부용(10cm)16,630본 - 담쟁이(8cm) 20본 - 줄사철(8cm) 925본 잔디식재 5,267㎡	499,440	- 왕벚나무(H4.0×B12) 116주 - 왕벚나무(H4.5×B15) 27주 - 산수유(H3.0×R12) 6주 - 소나무(H9.0×R35) 12주 - 소나무(H9.5×R40) 12주 둥근소나무(H1.5×W2.0) 28주 공작단풍(H2.0×R2) 13주 - 회양목(H0.3×W0.3)16,252주 - 황매화(H1.0×W0.4) 5,865주 - 산철쭉(H0.3×W0.3) 19,610주 - 자산홍(H0.3×W0.3) 17,960주 - 조팝나무(H0.6×W0.3) 2,780주 - 영산홍(H0.3×W0.3) 1,070주 - 화살나무(H0.8×W0.3) 3,046주 - 개나리(H0.6×3가지) 1,650주 - 사철나무(H1.2×W0.5) 420주 - 맥문동(3-5분얼) 10,550본 - 부용(10cm)12,821본 - 담쟁이(8cm) 0본 - 줄사철(8cm) 925본	479,392	-20,048
시설물	- 조경유용석(3-4목) 279.4t - 우드칲포설(T3cm) 3,445.5 ㎡ - 와이어로프 185m - 지주목 196개	41,025	- 조경유용석(3-4목) 279.4t - 우드칲포설(T3cm) 3,445.5 ㎡ - 와이어로프 185m - 지주목 214개	41,119	94
수목이식	5,434주	135,680	5,434주	135,680	0	기이식분
	-	-	3,865주	27,210	27,210	금회분
수목 제거	14주	2,483	14주	2,483	0	기 제거분

※세부사항(정산수량포함) – 내역서 참조

□ 공사비 증감내역

공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
직접공사비	678,628	685,884	7,257
제 경 비	99,777	101,337	1,560
물가상승비	30,443	24,917	-5,526
임목폐기물비	1,052	1,052	0
도 급 액	890,890	894,509	증 3,619	부가세포함

(단위 : 천원)

Ⅴ		검토의견

○ 감리 실정내용과 같이 보도신설에 따른 가로수 식재, 사면부 수종교체 등

타당성이 있음으로 구로구 요청사항을 반영하여 승인하고 변경내역을 설계변경에      반영코자 함.

○ 신규단가는 협의율 적용

계약당사자간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를

기준으로 하여 산정한 단가와 그 단가에 낙찰율을 곱한 금액을 합한 금액     의 100분의50으로 한다.(공사계약일반조건 제20조 제1항).

붙  임 : 내역서, 단가합의서 각 1부.  끝.